2-2		복합문화체육센터 권역별 확충

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
○			○	○					○

현황 및 목표

현황		○ 지역 생활체육 활성화 기반을 조성하고 지역 간 균형 있는 문화 발전을 위한 생활체육과 문화, 복지가 결합된 지역 거점 조성
목표		○ 생활 인프라의 지역 간 불균형 해소하여 지역 균형발전에 기여 ○ 체육시설의 기능 및 인근 주민들의 문화와 복지의 거점시설 조성

□ 삼락복합문화체육센터 조성

사업개요

□ 사업개요

○ 위    치: 사상구 삼덕로 21(삼락동402-7)

○ 사 업 비: 45,404백만 원(국비 4,600, 시비 4,630 구비 36,174)

- 설계비 1,040, 공사비 29,939, 감리비 등 1,692, 철거비 1,100, 부지매입비 11,633

○ 사업규모: 건축면적 2,189㎡, 연면적 8,998.36㎡, 부지면적 3,766㎡

- 지하1층~지상5층: 수영장, 체육관, 생활문화센터, 행정복지센터, 주차장

□ 사업현황

○ 2017. 6. 국방부와 국유재산 매매계약 체결

○ 2020. 2. 건립계획(안) 수립

○ 2020. 9 생활SOC 복합화사업 선정

○ 2021. 5 市 공공건축심의

○ 2021. 10. ~ : 실시설계

○ 2022. 9. ~ 2022. 12.: 구 사상경찰서 건물 철거 공사

○ 2022. 10. 26.: 市 건설기술심의(설계심의, 공사기간 적정성)

○ 2022. 11. ~ 2023. 3.: 신재생에너지 및 각종 예비인증 접수, 건축 협의 등 행정절차

○ 2023. 4.: 공사 발주 및 착공 예정

□ 문제점 및 대책

○ 글로벌 공급망 차질 등으로 인한 공사 원자재 및 노무비 가격 상승으로 공사비 증액 예상

(기존 299억 원 → 예상 315억 원)

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 인증 절차 및 설계 심의 등 행정절차 구.사상경찰서 철거공사
건립 공사 (23. 4. 공사 발주 예정)

* 공약달성 확인지표(달성률)  10%(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	45,404	14,408	1,500	10,300	12,000	7,196
국 비	4,600	500	1,200	2,900	0	0
시 비	4,630	150	90	390	2,000	2,000
구 비	36,174	13,758	210	7,010	10,000	5,196
기 타

□ 엄궁유수지 복합문화체육센터 조성

사업개요

□ 사업개요

○ 위    치: 사상구 감전동 516번지(엄궁유수지)

○ 사 업 비: 28,613백만 원(국비 7,565  시비 10,982  구비 10,066)

○ 사업규모: 건축연면적 5,340㎡

- 지상1층: 필로티, 지상 2~3층: 키즈실내워터파크(수영장), 체육관, 도서관 등

□ 사업현황

○ 2022. 10.: 도시관리계획 수립 용역 시행

※ 도시관리계획 결정사항

- 하천해제구역(A=9,756㎡) 내 용도지역(일반공업지역→준공업지역) 변경

- 도시관리계획(유수지, 문화체육시설) 중복 결정

○ 2022. 12.: 市공공건축심의위원회 심의, 지반조사용역 실시

○ 2023. 1.: 설계공모

○ 2023. 5.: 실시설계

○ 2024 ~ 2025: 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

○ 사업대상지 하천구역은 해제되었으나 도시계획결정(문화체육시설)을 위한 용도지역변경

(일반공업지역 → 준공업지역)이 추가적으로 필요하여 용역 중

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022		2023	2024	2025	2026
건립 타당성 및 기본설계 용역
수자원관리위원회 심의 도시관리계획 수립 용역
설계공모 및 실시설계
건립공사

* 공약달성 확인지표(달성률)  10%(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	28,613	6,249	7,307	4,991		10,066
국 비	7,565	5,249	2,316
시 비	10,982	1,000		4,991	4,991
구 비	10,066					10,066
기 타

□ 중앙정부 도움

○ 2020년도 생활 SOC 복합화 공모사업 선정 등 국비 지원

추진부서	문화체육과	담당팀	체육진흥팀	담당자	정재환(☎4532)
	미래청년기획단		비전추진팀		권민영(☎5232)