2-4		엄궁지역 도서관 신설

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
○			○	○					○

현황 및 목표

현황		○ 상대적으로 소외되었던 엄궁지역 및 인근 주민들에게 양질의 여가문화 활동 공간 마련 필요
목표		○ 지식정보욕구 충족 및 문화향유기회 제공 ○ 지역 내 부족한 문화체육시설 확충으로 동·서간 문화격차 해소 및 구민의 삶의 질 향상

사업개요

□ 사업개요

○ 위    치: 사상구 감전동 516번지

○ 사업규모: 복합문화체육센터 내 3층(연면적 1,140㎡)

○ 사업기간: 2019 ~ 2025

○ 총사업비: 5,830백만 원

- 도서관 건립비▸5,130백만 원(국비 2,565, 시비 1,282, 구비 1,283)

- 도서구입 등▸700백만 원(구비)

□ 문제점 및 대책

○ 해당부지는 市 하천구역으로 지정되어 있어 하천구역 해제를 위한 사전절차 이행으로 추진

기간이 지연

○ ′22. 9. 하천구역에서 해제(하천기본계획 고시)됨에 따라, 사상재생사업지구계획 수립 용역,

설계공모 등을 거쳐 ′23. 5. 실시설계 용역 착수 예정

○ 균형발전특별회계는 2회계연도 초과 이월이 불가함에 따라, 2020년 교부 받은 균특(1,334백

만원) 2023년 보조금 반환 대상임. 반납분에 대한 지방비 추가 확보 대책 마련을 위한 소관

부서 협의 필요

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022		2023	2024	2025	2026
건립 타당성 및 기본설계 용역
수자원관리위원회 심의 도시관리계획 수립 용역
설계공모 및 실시설계
건립공사

* 공약달성 확인지표(달성률)  10%(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	5,830	2,149	816	2,865
국 비	2,565	1,949	616	-
시 비	1,282	-	-	1,282
구 비	1,983	200	200	883	700

추진부서	평생교육과	담당팀	평생학습팀	담당자	김정란(☎4921)