5-6		사상근린공원 조성 조기 완료

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
○			○		○			○

현황 및 목표

현황		○ 2020년 7월 도시공원 일몰제로 장기미집행 도시공원 해제에 따른 난개발을 방지
목표		○ 기존 사상근린공원 숲속 모험놀이장과 연계성이 부여된 특화 공원화

사업개요

□ 사업개요

○ 사업면적: A=293,431㎡(공원 243,594㎡, 비공원시설 49,837㎡)

※ 비공원시설(49,837㎡) ▸ 공원면적(572,919㎡)

구 분	연면적(㎡)	용도지역	비고
공동주택	135,935.8	제2종 일반주거지역	10개동

○ 시 행 자: 부산광역시장, ㈜사상파크홀딩스 ☞ 공동시행

○ 사업기간: 2017 ~ 2025

○ 사 업 비: 3,371억원(공원 626억, 비공원시설 2,745억) - 민간자본

□ 사업내용

○ 2019. 10. ~ 11.: 도시계획위원회 및 도시공원위원회 심의

○ 2020.  3.: 공원조성계획변경결정 및 지형도면 고시

○ 2020.  6.: 도시계획시설사업 고시

○ 2021. 10.: 사유지 보상금 지급 완료

○ 2022.  5.: 비공원시설 주택건설사업계획 승인

※ 2022. 12.: 비공원시설 착공 예정 / 국유지 토지보상 중

□ 문제점 및 대책

○ 민간공원 특례사업 설계 보완 및 특화사업 추진으로 조성공사 일정 지연

- 총괄계획가 회의 참석 등으로 원활한 사업 추진 및 공조

○ 주차장 확충, 반려동물놀이터 등 우리구 요구사항이 반영되도록 부산시에 건의

○ 조속한 사업 시행 및 우리구 요구사항 반영을 위하여 부산시와 소통 체계 구축

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022. 7.		2023				2024	2025	2026. 6.
조성계획변경 및 실시계획 수립
사업시행

* 공약달성 확인지표(달성률)  0%(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	30,500	8,045	8,045	16,090	274,500
국 비
시 비
구 비
기 타	30,500	8,045	8,045	16,090	274,500

추진부서	녹지공원과	담당팀	경관생태TF팀	담당자	김의진(☎5141)