8-10		괘내 생태문화마을 조성

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
○			○	○					○

현황 및 목표

현황		○ 도심 내 오지마을의 특성을 살려 생태문화마을 구축 ○ 지속적인 주민역량 강화를 통해 공동체를 회복하고, 주민 스스로 마을을 가꾸어 가는 도시재생기반 마련
목표		○ 전원마을 조성을 통한 주민 삶의 질 향상 및 마을 이미지 제고 ○ 생활밀착형 기초생활인프라 확충을 통한 정주 환경 개선 ○ 주민역량강화와 참여 확대를 통한 지속가능한 도시재생 기반 구축

사업개요

□ 사업개요

○ 사 업 지: 괘법동 468번지 일원(56,549㎡)

○ 사업기간: 2020 ~ 2023(4년)

○ 사 업 비: 9,723백만 원(국비 4,730, 시비 2,365, 구비 2,628)

□ 사업내용

○ 주요사업: 3개 분야, 9개 사업

① 주거복지실현: 순환형 공공임대 주택 조성, 노후주택 정비사업, 클린하우스 조성

② 마을활력 기반 구축: 경부선 경관개선사업, 괘내IN블랙박스 사업, 괘내마을 오아시스 사업

③ 공동체 회복 및 일자리 창출: 행복충전소 조성, 친환경 One Day Tour, 마을DNA발전사업

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022. 7.		2023		2024		2025		2026. 6.
주거복지 실현
마을활력 기반 구축
공동체 회복 및 일자리 창출

* 공약달성 확인지표(달성률)  70%(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	9,723	7,287	2,436
국 비	4,730	4,009	721
시 비	2,365	880	1,485
구 비	2,628	2,398	230
기 타

추진부서	도시재생과	담당팀	도시재생기획팀	담당자	지상봉(☎4942)