10-3		관문대로 방음벽 설치․교체

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
○		○		○				○

현황 및 목표

현황		○ 모라동 관문대로(모라고가교) 일원 차량소음으로 인한 주민 불편 지속적 발생으로인한 방음터널 신설 및 노후 방음벽 정비 필요
목표		○ 도시미관을 저해하는 노후방음벽 교체 및 방음터널 설치로 쾌적하고 안전한 도로 조성 및 교통소음 관련 주민생활불편 최소화

사업개요

□ 사업내용

○ 위    치 : 모라동 백양터널 앞 모라고가교(모라주공APT~삼락IC)

○ 사업개요 : 방음터널 설치(편측) L=350m, H=4.5m 방음벽 정비(양측) L=1,450m, H=3m

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026

○ 사 업 비 : 17,000백만 원(공사 16,900, 설계 100)

□ 사업계획

○ 2023. 1.: 市 재배정 확보( 650백만원 )

○ 2023. 1. ~ 2023. 12.: 실시설계용역 시행

○ 2023. 6. ~ 2023. 12.: 1차 공사 시행(방음터널 L=80m)

○ 2024. 1. ~ 2026. 12.: 2차 ~ 3차 공사 예산 확보 후 공사시행 (방음터널 및 방음벽 교체 L=1,720m)

□ 문제점 및 대책

○ 열악한 구 재정 여건상 전구간 예산 확보 어려움으로 단계별 사업시행

○ 부산시와 적극적인 협의를 통해 예산 확보 노력

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022. 12.		2023					2024	2025	2026. 6.
실시설계 용역 시행
공사 시행

* 공약달성 확인지표(달성률)  5%(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
계	17,000		650	3,100	3,500	4,875	4,875
국 비
시 비	17,000		650	3,100	3,500	4,875	4,875
구 비
기 타

추진부서	건설과	담당팀	토목1팀	담당자	황인철(☎4695)