10-5		사상대교·대저대교·엄궁대교(승학터널) 건설 지원

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
	○	○		○			○

현황 및 목표

현황		○ 만성적인 교통정체를 겪고 있는 낙동강 횡단교량 교통체증 해소 필요
목표		○ 광역교통망 확충을 위한 횡단대교 조기건설

사업개요

□ 사업개요

교량명	사업구간	규 모	사업비 (억 원)	사업기간
대저대교	식만~사상간	L= 8.24㎞, B=4차로	3,956	2014 ~ 2024
엄궁대교	생곡~엄궁간	L= 2.91㎞, B=6차로	3,455	2016 ~ 2024
사상대교	식만~사상간	L= 7.95㎞, B=4~6차로	4,000	2015 ~ 2027
승학터널	엄궁~북항	L= 7.69㎞, B=4~6차로	4,961	2016 ~ 2028

□ 사업내용

대저대교

○ 2018. 9.: 환경영향평가서(본안) 제출  ☞ 거짓·부실 검토 전문위원회(‘19. 11. ~ ‘20. 5.)

○ 2021. 12.: 제1차 라운드테이블 개최(12/2)

* 환경단체(김해경전철 근접 노선 주장), 부산시(대안노선 4개 모두 수용애로)

○ 2022. 7.: 대시민 공청회 추진

○ 2023. 10.: 공사 착공 예정 ※ 총사업비 변경 시 사업기간 조정(‘24 → ‘29)

엄궁대교

○ 2021. 11.: 소규모 환경영향평가 의견협의 ☞ 市→낙환청(11/30)

○ 2022. 11.: 소규모 환경영향평가 재협의 추진

○ 2023. 12.: 공사착공

○ 2028. 12.: 공사 준공(공사기간 조정 예정)

* 실시설계 완료 후 사업기간 연장 예정(‘24 → ‘28)

사상대교

○ 2017. 12.: 도로건설·관리계획 수립반영(동서4-1축, 가락~대연IC)

* 대저대교, 엄궁대교 등 낙동강횡단교량 건설 후 교통여건 등을 분석하여 사업 재검토 필요

○ 2025. 6.: 국토교통부 제5차(‘25.~‘26.) 대도시권 혼잡도로 개선계획 반영

○ 2027 ~ 2030: 공사 착공 및 준공(예정)

승학터널

○ 2022. 9.: 실시협약 협상 중

○ 2022 ~ 2023: 실시협약 체결 및 실시계획 승인도서 작성 및 승인

○ 2024 ~ 2028: 공사 착공 및 준공

위치도

대저대교

사상대교

엄궁대교

승학터널

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
대저대교
엄궁대교
사상대교
승학터널

* 공약달성 확인지표(달성률)  10%(2022.12.31.기준)

추진부서	건설과	담당팀	토목1팀	담당자	김동환(☎4692)