10-7		사상∼하단간 도시철도 조기 완공 추진

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
	○		○		○		○

현황 및 목표

현황		○ 2019년 승학산 산사태 발생, 스마트시티역 신설 및 새벽시장역 이전 ○ 하단 SK아파트 주민들의 반대에 따른 차량기지 착공지연 ○ 2호선 사상역과의 환승통로 설치문제 등의 이유로 완공 지연(2025년 이후 계통 예정)
목표		○ 조기 완공으로 주민의 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

□ 사업개요

○ 사업구간: 사상역(2호선) ~ 새벽시장 ~ 엄궁 ~ 낙동대로 ~ 하단역(1호선)

○ 사업규모: 총연장 6.9㎞, 정거장 7개소, 차량기지 1개소

▸ 정거장 7개소(사상, 새벽시장, 스마트시티, 학장천, 엄궁, 동아대, 하단)

○ 사업기간: 2010년 ~ 2025년

○ 총사업비: 6,672억 원(국 3,724 시 2,948)

□ 구간별 현황

구간별	공사구간	공사개요	착공	토목공정율	시공사
1공구	사상역(2호선)~민창철강	1,495m/정거장2	’15.12.	52	SK건설
2공구	민창철강~캐스텍코리아	1,302m/정거장2	’17.05.	60.4	두산건설
3공구	캐스텍코리아~법무보호복지공단 (지하화 결정▹14. 10. 10.)	2,312m/정거장1	’16.07.	75	한진중공업
4공구	법무보호복지공단~호서부산빌딩	778.7m/차량기지1	’17.05.	12.20	대림건설
5공구	호서부산빌당~하단역(1호선)	1,034m/정거장2	’15.12.	88.20	한화건설

□ 문제점 및 대책

○ 공사기간 연장에 따른 주민불편

▸ 1공구 내 공사 자재 적체 등으로 인해 도로가 정체되고 있으므로 조속한 시일 내 철거하여

도로 기능 회복 요구

○ 1공구 토목공사를 완료한 구간에 대하여 상부도로 기능 회복 조치

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022		2023		2024	2025	2026. 6.
공사 추진

* 공약달성 확인지표(달성률)   60%(2022.12.31.기준)

추진부서	교통행정과	담당팀	교통행정팀	담당자	이수영(☎4552)