1-5		신주례~냉정역 간 보행환경 개선

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
○		○		○					○

현황 및 목표

현황		○ 신주례 일원 경사로에 우천시 미끄럼 사고 발생 예방 필요 ○ 주민들의 이동이 빈번한 신주례~냉정역 간 보행환경 개선 필요
목표		○ 신주례~냉정역 간 보행환경 개선(보도정비 및 가로화단 조성) ○ 도로 정비 개설 등에 따른 도시환경 개선

사업개요

□ 사업개요

○ 위치(구간): 신주례 ~ 냉정역 일원

○ 사업규모

- 보도정비 및 가로화단 조성 L=150m 150백만원

- 도로(중로1-368호선)개설 L=78m, B=20m(보상에 한함) 1,871백만 원

※ 공사는 주택건설사업자[우리자산신탁(주)] 시행

○ 총사업비: 2,021백만 원(공사 150 보상 1,871)

□ 현재까지 추진경과

○ 보도정비 및 가로화단 조성

- 2022. 9. : 2023년도 본예산 편성 요구(150백만 원)

○ 도로(중로1-368호선)개설

- 2020. 5.: 도시계획시설 단계별 집행계획 공고

- 2020. 6.: 도시계획시설사업 실시계획 고시

- 2022. 9.: 1차 손실보상 완료 (4필지, A=149㎡)

- 2022. 10.: 주택건설사업자 사업시행자 지정 및 실시계획 인가

□ 사업내용

○ 보도정비 및 가로화단 조성

- 2023. 1.: 실시설계용역 착수

- 2023. 2.: 실시설계용역 완료

- 2023. 3.: 공사 착공

- 2023. 6.: 공사 준공

○ 도로(중로1-368호선)개설

- 2023. 1. ~ 12.: 소요예산 확보 및 잔여지 보상 추진

- 2024. 1. ~ : 잔여지 보상 후 공사 시행

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022		2023		2024		2025		2026
예산확보
토지보상
공사시행

* 공약달성 확인지표(달성률)  0 %(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	2,021	500	150	1,371
국 비
시 비	150		150
구 비	1,871	500		1,371
기 타

위치도 및 현장사진
	공약: 신주례 ~ 냉정역 간 보행환경 개선

추진부서	건설과	담당팀	도시계획팀	담당자	김현준(☎4711)
			토목2팀		최은주(☎4706)