2-6		부산도서관 옆 문화공원 조성(주차장 설치)

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
○			○	○					○

현황 및 목표

현황		○ 부산도서관은 82면의 주차시설을 갖추고 있으나, 차량 이용 가족 단위의 방문객들이 많아 주차 면수 절대 부족으로 이용에 큰 불편 초래 ○ 인근 주택가 불법주차 등 주변 지역 주차대란 발생 ○ 부산도서관 주변 부족한 공원 녹지공간 확충 필요
목표		○ 상징적 랜드마크인 부산도서관 주변 부족한 공원 녹지 공간 확충 ○ 덕포역 역세권 공영주차장 건립과 연계한 공원 조성 ○ 어린이 보호구역(덕포초) 연접, 보행권 확보를 위해 광장형 공원 조성 ○ 문화공원 지하에 공영주차장 건설을 통한 주차난 해소 및 주거환경 개선

□ 부산도서관 옆 문화공원 조성

사업개요

□ 사업개요

○ 위    치: 사상구 덕포동 415-1번지 등 3필지

○ 사업기간: 2016 ~ 2025

○ 사업규모: A=3,160㎡

○ 사업금액: 140억 원(공사 15, 보상 125)

○ 사업내용: 문화공원 조성 1식

□ 추진경과

○ 2017. 4.: 도시관리계획(공원) 결정 및 지형도면 고시

○ 2019. 3.: 도시계획시설사업 실시계획 고시/ ○ 2020. 4.: 토지보상 완료

○ 2020. 10. ~ 2021. 2.: 건축물 철거공사 완료 ☞ 건축물 16개동, 잔디광장 조성

○ 2022. 2. ~ 8.: 지하주차장 건립 실시설계 용역 시행  건축과 (실시설계 용역 중지 中)

○ 2022. 5. ~ 9.: 도시관리계획(공원, 주차장) 중복결정 용역 시행  교통행정과

○ 2022. 6.: 문화공원 설계변경 용역 시행 (‘22. 6. ~ ’23. 2.)

※ 덕포역 역세권 지하주차장 실시설계용역(안) 결정 등 선행(공정) 절차 이행에 필요한 소요기간   및 市 도시공원 위원회 심의를 위하여 일지 중지 (’23. 1. 17.~)

□ 문제점 및 대책

○ 덕포역 역세권 공영주차장 공사가 선행되어야 공원 조성공사 추진이 가능함

- 지하주차장 공사 추진일정을 감안, 공원 조성계획 변경 등 행정절차를 사전 이행하여

공기단축 추진

○ 지하주차장 건립으로 인해 지반 하중 관계로 식재 및 시설물 설치가 제한적임

- 현지 여건에 부합된 식재 및 시설물 설치 등 관련부서와 지속적으로 협의

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022. 7.		2023		2024		2025		2026. 6.
조성계획변경 및 실시계획 수립
공사시행

※ 덕포역 역세권 공영주차장 준공 이후 공원조성 공사 추진

* 공약달성 확인지표(달성률)  20%(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
계	14,595	13,069			1,526
국 비
시 비	11,000	11,000
구 비	2,895	1,369			1,526
기 타 (특교세)	700	700

□ 부산도서관 옆 주차장 설치

사업개요

□ 사업개요

○ 위    치: 덕포동 415-1번지 외 2필지(부산도서관 문화공원) ▹시유지

○ 규    모: A=2,807.67㎡, 지하1층 68면, 철근콘크리트

○ 사 업 비: 5,900백만 원(국 2,400, 시 960, 구 1,440, 특별조정교부금 1,100)

○ 사업기간: 2022 ~ 2024

□ 추진경과

○ 2022.  2.: 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2022.  4.: 도시관리계획(시설: 공원, 주차장) 중복결정 용역 착수

○ 2022.  6.: 설계용역 일시정지

○ 2022.  8.: 도시관리계획 중복결정 용역 완료

○ 2022. 10.: 영구시설물 축조 및 토지사용 허가관련 합의(부산시 공원정책과)

○ 2022. 11.: 영구시설물 축조 관련 시의회 동의

○ 2023.  3.: 실시설계 용역 완료

○ 2023.  4. ~ 2024. 3.: 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

○ 市 예산 960백만 원 2023년 제1회 추경 시(’23. 5.) 편성예정으로 공사착공 지연

○ 기존 확보된 예산으로 차수별 공사(토목공사) 시행

○ 토지 무상사용 허가를 위해 市 회계재산담당관실과 협의 및 시의회 동의(’23년)

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022. 7.		2023		2024		2025	2026
실시설계용역 추진
공사 시행

* 공약달성 확인지표(달성률)  10%(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	5,900	(200)	3,500	2,200
국 비	2,400		2,400
시 비	960			960
구 비	1,440	(200)		1,240
기 타 (특별조정교부금)	1,100		1,100

추진부서	녹지공원과	담당팀	공원팀	담당자	배석한(☎4522)
	교통행정과		교통행정팀		이수영(☎4552)