5-1		백양산 산림휴양레포츠타운 조성

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
	○	○			○		○

현황 및 목표

현황		○ 원도심의 산과 생활권이 결합된 생활 밀착형 산림휴양레포츠타운(휴양림) 필요
목표		○ 생활 밀착형 산림휴양레포츠타운(휴양림) 조성 ○ 도시재생, 관광, 시민건강, 지역경제 활성화 일자리 창출

사업개요

□ 사업개요

○ 위    치: 사상구 모라동 산 23번지 일원

○ 기    간: 2022 ~ 2027

○ 면    적: A=85,642㎡

○ 사업예산: 25,000백만 원(산림청 국가사업 시행)

○ 사업내용: 숲속 야영시설, 산림체험·교육시설, 산림레포츠 시설 조성

□ 문제점 및 대책

○ 군부대 부지의 폐지 일정이 미정으로 사업 시기가 늦어짐

▸ 국방부 및 산림청 지속적 협의로 조속한 사업 시행 독려

○ 산림휴양레포츠타운(휴양림) 지정‧고시 등 행정절차 이행 장기화

▸ 군부대 이전 사전입지조사 등 사전협의를 통해 절차 간소화

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022. 7.		2023		2024		2025	2026. 6.
예비군훈련장 내 사유지 매입
실시설계 및 기반공사
공사착공 및 준공

* 공약달성 확인지표(달성률)  0%(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
계	25,000			500	1,109	1,000	5,991	16,400
국 비	25,000			500	1,109	1,000	5,991	16,400
시 비
구 비
기 타

추진부서	녹지공원과	담당팀	경관생태TF팀	담당자	노신영(☎5142)