5-8		삼락천변 쉼터 조성, 침수위험 해소

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
	○	○		○		○			○

현황 및 목표

현황		○ 낙후된 공업지역의 이미지를 개선하고 주민의 보행권 확보 필요 ○ 집중호우시 삼락천 외수위 상승 및 하수관로 배제능력 부족 등으로 침수피해 발생 ○ 매년 반복되는 우수기 침수피해를 예방하고 쾌적한 주민 생활환경 조성을 위해 준설사업 필요
목표		○ 삼락천 변에 쾌적하고 안전한 쉼터공간을 조성 ○ 저지대 침수피해 지역주민의 생활환경 개선 및 재산보호 ○ 삼락천·감전천 일원 상습침수지역 및 주요 복개구조물(제2종)인 하수 BOX 내 준설과 측구, 집수정 등 준설사업을 통해 호우피해 예방 및 쾌적한 생활환경 조성

□ 삼락천변 쉼터 조성

사업개요

□ 사업개요

○ 교량주변 쉼터 공간 조성

- 소요예산 : 3,746백만 원(국비:지방비 / 5:5)

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년

- 사업내용 : 삼락천 교량 주변 보행자 안전통로 확보 및 삼락천 이용 주민을 위한 쉼터를

조성하여 편안하고 친숙한 하천 친수공간 조성

- 위    치 : 삼락수로 3호교, 4호교, 5호교

- 규    모

‣ 교량확장: 1,000㎡, 주야간경관개선: 880m, 쉼터조성: 3개소, 공연∙전시시설 조성

□ 사업내용

○ ‵22. 10.: 삼락천 교량 보행자 안전 통행로 확충(삼락천 강변 도심보행길 조성공사)

○ ‵23. 03.: 삼락천 교량 보행자 안전 통행로 확충(낙동제방~삼락천 간 보행로 연결공사)

○ ‵23. 09.: 국토부 도시재생사업(특화재생) 공모 신청 ※ 도시재생과 → 市 창조도시과

○ ‵23. 12.: 국토부 도시재생사업(특화재생) 공모 선정 ※ 총 사업비 317.5억

○ ‵24. 04.: 市 도시재생위원회 심의

○ ‵24. 06.: 덕포시장 일원 도시재생활성화계획 고시

위 치	3호교 쉼터
4호교 쉼터	5호교 쉼터

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022		2023	2024		2025	2026		임기 후
교량 안전보행로 확충공사
도시재생사업 공모 신청 및 선정
市 도시재생위원회 심의
현황조사 및 기본 · 실시설계
공사착공 및 준공

* 공약달성 확인지표(달성률)  10 %(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2026 이후
계	3,746.0					280	3,466.0
국 비	1,873.0					140	1,733.0
시 비	936.5					70	866.5
구 비	936.5					70	866.5
기 타

□ 삼락천변 침수위험 해소(건설과)

사업개요

□ 사업개요

○ 사 업 명: 삼락지구 자연재해위험개선지구 정비사업

○ 위    치: 삼락천 유역 일원

○ 규    모: 삼락천 일원 하도 및 관로 정비 등

○ 총사업비: 45,500백만원

○ 사업기간: 2022년 ~ 2027년

□ 사업내용

○ 2021. 9.: 삼락지구 자연재해위험개선지구 지정 고시 및 사업선정

○ 2022. 3.: 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2023. 9.: 행정안전부 사전설계검토(기본설계) 심의

○ 2024. 3.: 삼락지구 자연재해위험개선지구 지정(변경) 고시

○ 2024. 9.: 행정안전부 사전설계검토(실시설계) 심의

○ 2025. 2.: 지방건설기술심의, 계약심사 등

○ 2025. 3. ~ 2027. 6.: 공사 시행

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022. 7.	2023	2024	2025		2026. 6.	임기 후
기본 및 실시설계 용역 시행 (사전설계검토, 설계VE 등 행정절차 포함)
공사 시행

* 공약달성 확인지표(달성률)  80%(2024.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
계	45,500		3,360	5,835	3,200	500	5,700	26,905
국 비	22,750		1,140	3,890	1,600	250	2,850	13,020
시 비	11,375		1,650	-	800	125	1,425	7,375
구 비	11,375		570	1,945	800	125	1,425	6,510
기 타

□ 중앙정부 도움

○ 국시비 매칭(국 50%, 시 25%, 구 25%) 사업에 따라 연차별 예산 확보 필요

□ 삼락천변 침수위험 해소(안전총괄과 : 침수지역 내 하수BOX, 측구 및 집수정 등 준설)

사업개요

□ 사업개요

○ 우수기 상습침수지 준설사업: 2 ∼ 3개소【매년(우수기 전)】

○ 주요 복개구조물(하수BOX) 내부 준설공사: 매년(우수기 전)

※ ‘23년도 복개구조물(하수BOX) 내부 준설공사 대상지

	<’22년도 추진실적>
☞ 삼락천변 상습(덕포시장 등) 일원 측구 준설 - 가야대로 일원 상습침수지 준설사업: L=1,104m, V = 296㎥, W = 518ton - 덕포시장 일원 등 주거지역 골목길 준설사업: L=956m, V = 147㎥, W = 176ton ☞ 감전1·2·3중천, 감전유수지지류, 운산천, 학장천지류 하수BOX 준설 - 감전제1중천 외 3개소 준설사업: L=950m, V = 652 W = 775ton

감전유수지지류 복개구조물 외 3개소 준설물량(800㎥), 사업비 40백만원

○ 민원 발생지역 자체 준설(수시)

- 사업기간: 연중 계속

- 대상지역: 관내 전역 (민원발생 및 긴급 준설 요구 지역 등)

- 준설장비/인력: 준설차량 2대, 준설 팀 편성 운영(공무직 도로관리원 5명)

○ 구글맵을 활용한 준설지도 빅데이터 구축

- 기간/지역: 연중(지속추진), 관내 준설완료지역

- 사 업 비: 비예산 사업

- 목    적: 침수예상지 파악 및 향후 준설대상지 선정 시 활용

- 관리정보: 자체준설(2,237건), 용역준설(20건), 복개구조물 준설(10건) 등

□ 문제점 및 대책

○ 복개구조물 내 준설 사업비 확보는 해당 구 소관 사항으로 국·시비 지원 전무

‣’23년 복개구조물 준설 사업비(4억원) 구비 확보

○ 우수기 상습침수지역 및 주거지역 골목길 준설‣ 매년 구비 확보

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022		2023		2024			2025		2026
2022 주거지역 골목길 하수구 준설사업
우수기 상습침수지 측구·하수BOX 준설사업
자체 준설 (수시)

* 공약달성 확인지표(달성률)  19 %(2022.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	4,380	(350)	450	700	720	720	720	720
국 비	0
시 비	0
구 비	4,380	(350)	450	700	720	720	720	720
기 타	-	-	-	-	-	-	-

추진부서	건설과	담당팀	하수관리팀	담당자	송명석(☎5132)
			하수관리팀		장주희(☎5129)
	도시관리과		하천생태팀		양주성(☎4682)