10-2		구덕터널~꽃마을 연결 도로 개설

기간		유형		예산		주체
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	부산시	부산시+사상구	사상구	기타 (민간 등)
○			○	○					○

현황 및 목표

현황		○ 학장동 구덕터널 상부도로~서구 꽃마을간 현황도로 폭 협소(폭3~4m)
목표		○ 구덕터널 화재 등 재난 대비 우회도로 기능 및 안전한 차량 통행로 확보를 위해 도로개설(확장) 추진

사업개요

□ 사업개요

○ 위    치: 사상구 학장동 산62-8번지 ~ 서구 꽃마을 경계

○ 사업규모: 도로개설(확장) L=874.9m, B=8~14.4m

○ 사 업 비: 7,370백만원(공사 4,670, 보상2,600, 기타100)

○ 사업기간: 2020 ~ 2025.

□ 사업내용

□ 추진경과

○ 2020. 3. ~ 2022. 6.: 도시관리계획(도로) 결정 및 실시설계 용역

○ 2020. 12.: 도시관리계획(도로) 결정(신설) 및 지형도면 고시

○ 2022. 06.: 1차 공사 착공(L=543.4m, B=8~9m)

○ 2023. 12.: 1차 공사 준공

○ 2024. 04.: 2차 공사 착공(L=331.5m, B=8~14.4m)

□ 향후계획

○ 2025. 04.: 2차공사 준공(L=331.5m, B=8~14.4m)

연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부추진내용	2022		2023		2024	2025		2026.6
1차구간 보상 및 공사 추진 (L=543.4m, B=8~9m)
2차구간 보상 및 공사 추진 (L=331.5m, B=8~14.4m)

* 공약달성 확인지표(달성률)  80%(2024.12.31.기준)

연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	7,370	2,890	1,400	1,300	1,780
국 비
시 비	50	50
구 비	4,920	1,040	1,400	700	1,780
기 타	2,400	1,800		600

추진부서	건설과	담당팀	도시계획팀	담당자	이진우(☎4712)