1-1		경부선 철도 지하화

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	■ 국가 ■ 부산시 □ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	□ 예산 ■ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	교통행정과 교통행정팀	담당자	이수영 (☎4552)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 기간: 2022 ~ 2030년

○ 위치: 부산시 화명역 ~ 부산진역 구간(L=17Km) ※ 우리구 약 7Km

○ 총사업비: 1조 5,500억 원(국비 등)

□ 사업내용

○ 경부선 철도 지하화, 철도 유휴부지 및 역세권 개발 등

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내														임기 후
	2022.7		2023		2024						2025		2026.6
제도개선 추진 (국토부)
철도지하화 종합계획 수립 등 (국토부)
선도사업 선정 및 기본계획 수립 (부산시)
사업시행자 지정 및 실시계획 승인 (부산시)
착공 및 준공 (부산시)

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
경부선 철도 지하화 관련 용역 시행	• (부산시) 경부선 철도 지하화 사업 실행계획 수립 용역 착수 및 완료 • (국토부) 철도시설 및 역세권의 효율적 활용을 위한 제도개선 연구용역 착수 및 완료

□ 현재까지 추진경과

○ 2019. 1.: 타당성 검토 용역비 확보 35억(국비)

○ 2020. 3.: 용역 착수보고회 개최

○ 2021. 6.: “제4차 국가철도망 구축계획” 미반영

- 국가철도망 구축 수정계획(‘26년) 반영 지속 요구

○ 2021. 8.: 경부선 철도직선화 등 시설효율화 연구용역 준공

○ 1단계(2019 ~ 2020): 경부선 철도 지하화 타당성 검토 용역

○ 2단계(2021 ~ 2022): 경부선 철도 지하화 기본계획 수립

○ 2022. 1.: (국토부) 철도시설 및 역세권의 효율적 활용을 위한 제도개선 연구용역 추진

○ 2022. 5.: 도심철도 지하화 국정과제 반영 ▹ 국토부 제도개선 검토

○ 2023. 2.: (부산시) 경부선 철도 지하화 관련 사업 실행계획수립 용역 시행 (※  ‘25. 7. 용역 완료)

○ 2024. 1.: 「철도 지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법」 제정

○ 2024. 3.: (국토부) 철도 지하화 종합계획 수립 연구용역 착수

○ 2024.10.: (부산시) 국토교통부 철도지하화 선도사업 제안서 제출

○ 2025. 2.: 1차 선도사업지 선정 ▹ 부산진역 ~ 부산역

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	25	40	40	40	50	60	60	65	65	70	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• (국토부) 철도시설 및 역세권의 효율적 활용을 위한 제도개선 연구용역 추진
2023년 1분기	• (부산시) 경부선 철도 지하화 사업 실행계획 수립 용역 계획수립 • (국토부) 철도시설 및 역세권의 효율적 활용을 위한 제도개선 연구용역 중단
2023년 2분기	• (부산시) 경부선 철도 지하화 사업 실행계획 수립 용역 착수 • (국토부) 철도시설 및 역세권의 효율적 활용을 위한 제도개선 연구용역 중단 - 철도지하화 특별법 발의 준비 중
2023년 3분기	• (부산시) 경부선 철도 지하화 사업 실행계획 수립 용역 일시정지(6. 5.) - 국토부 특별법안 발의 후 용역 재개 예정 • (국토부) 철도시설 및 역세권의 효율적 활용을 위한 제도개선 연구용역 중단 - 철도지하화 특별법 발의 준비 중
2023년 4분기	• (부산시) 경부선 철도 지하화 사업 실행계획 수립 용역 재개(10. 1.) • (국토부) 철도 지하화 및 지원에 관한 특별법안 발의

분기	추진내용	비고
2024년 1분기	• (부산시) 경부선 철도 지하화 관련 사업 실행계획 수립 용역 추진 • (국토부) 철도 지하화 및 지원에 관한 특별법 제정(‘24. 1.) 철도 지하화 종합계획 수립 연구용역 착수(’24. 3.)
2024년 2분기	• (부산시) 경부선 철도 지하화 관련 사업 실행계획 수립 용역 중간보고(‘24. 6.) • (국토부) 선도사업 가이드라인 배포(‘24. 6.)
2024년 3분기	• (부산시) 경부선 철도 지하화 관련 사업 실행계획 수립 용역 추진 • (국토부) 철도 지하화 종합계획 수립 연구용역 추진
2024년 4분기	• (부산시) 선도사업 신청 • (국토부) 철도 지하화 종합계획 수립 연구용역 추진
2025년 1분기	• (국토부) 1차 선도사업지 선정 ▹ 부산진역 ~ 부산역

□ 문제점 및 대책

○ 선도사업 미반영 구간(구포~가야차량기지) 국토부 종합계획에 반영될 수 있도록 노력 필요

□ 향후 추진계획

○ ’25. 5. (부산시) 선도사업 미반영 구간 국토부 종합계획 반영 건의

○ ‘25. 6. ~ ’26. 12. (부산시) 철도지하화 통합개발사업 기본계획 수립

○ ‘25.12. (국토부) 철도 지하화 종합계획 확정·고시

○ ’27. ~ ‘36. (부산시) 사업시행자 선정, 실시계획 승인 등 사업 추진

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	8	-

○ 언론/방송 보도

2024.01.10.(부산일보)	2024.01.26.(국제신문)

2024.02.02.(부산일보)	2024.01.31.(국제신문)
2024.04.05.(부산일보)	2024.10.24.(부산일보)
2025.02.19.(연합뉴스)	2025.02.25.(부산일보)