1-4		삼락공원 접근성 향상을 위한 리버브릿지 및 타워 설치

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 ■ 부산시 □ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 ■ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	건설과 토목1팀	담당자	신지현 (☎4692)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 사 업 명: 사상 리버프런트시티(브릿지) 조성사업

○ 위    치: 삼락동 419-13 ~ 29-27번지 (삼락생태공원)

○ 규    모: 브릿지(공원형 보도교) L=200m, B=7~15m ☞ 17,000백만원(시 17,000)

○ 총사업비: 17,000백만원(시 17,000)

○ 사업기간: 2022년 ~ 2027년

○ 사업추진: 부산시 공원도시과

□ 사업내용

○ 도로, 하천 등으로 도심지와 단절된 삼락생태공원의 접근성 향상을 위하여 리버브릿지 및 타워 설치를 통해 접근성 향상과 여가공간 제공

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내										임기 후
	2022.7.		2023		2024		2025		2026.6.
설계 시행
공사 시행

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	17,000	-	700	-	-	-	16,300
국 비
시 비	17,000	-	700	-	-	-	16,300
구 비
기 타

□ 중앙정부 도움

○ 해당없음

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
사상 리버프런트시티(브릿지) 조성사업	• 사상 리버프런트시티(브릿지) 조성사업 설계용역 완료

□ 현재까지 추진경과

○ 2022. 05. : 市 투자심사 완료(조건부)

○ 2022. 07. : 공유재산관리계획 반영(원안의결)

○ 2023. 08. : 시장 방침 결정(사업계획 변경) ► 국회의원, 사상구청장 등 설명

▷ (사업규모) 브릿지 종점부에 타워 기능을 포함한 전망대 조성

○ 2023. 10. : 기본설계 용역 착수

○ 2024. 02. : 기본설계 용역 일시정지

▷ 보도교 형식 등 전문가 자문 및 대안 검토 필요

○ 2024. 04. : 전문가 자문회의 개최

○ 2024. 09. : 기본설계 용역 재개

○ 2024. 12. : 기본설계 용역 완료 및 업무이관(낙동강관리본부→市공원도시과)

○ 2025. 01. ~ : 교량형식 및 디자인(안) 검토

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	5	10	20	35	45	60	70	85	★100	100	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1분기	• 관련기관(부서) 의견 협의 및 검토	市공원도시과
2023년 2분기	• 사업 방침 결정
2023년 3분기	• 사업 추진 준비
2023년 4분기	• 기본설계 용역 착수
2024년 1분기	• 기본설계 추진
2024년 2분기	• 전문가 자문회의 개최(교량형식, 디자인 등)
2024년 3분기	• 기본설계 추진
2024년 4분기	• 기본설계 용역 완료, 업무이관(낙동강관리본부→공원도시과)
2025년 1분기	• 교량 형식 및 디자인(안) 검토

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 2025. 상반기~: 교량 형식 및 디자인(안) 검토(낙동강유역 5대 정원·공원 통합디자인 기본구상 수립 용역)

○ 2025. 하반기~: 행정절차 이행 및 공사 추진(예정)

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-