2-4		엄궁지역 도서관 신설

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	평생교육과 평생학습팀	담당자	류수진 (☎4921)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 사상구 감전동 516번지

○ 사업규모: 복합문화체육센터 내 지상 3층~4층(연면적 2,557㎡)

○ 사업기간: 2019 ~ 2027

○ 총사업비: 5,830백만 원

- 도서관 건립비▸5,130백만 원(국비 2,565, 시비 1,282, 구비 1,283)

- 도서구입 등▸700백만 원(구비)

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내						임기 후
	2022		2023	2024	2025	2026.6월
건립 타당성 및 기본설계 용역
수자원관리위원회 심의 도시관리계획 수립 용역
설계공모 및 실시설계
건립공사

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	5,830	2,149	816	883	-	-	1,282	700
국 비	2,565	1,949	616	-	-	-	-	-
시 비	1,282	-	-	-	-	-	1,282	-
구 비	1,983	200	200	883	-	-	-	700
기 타

Ⅱ. 추진실적

□ 공약이행확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
엄궁유수지 복합문화체육센터 내 공공도서관 건립	• 도서관 준공

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	-	12	15	17	19	20	55	56	58	60	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1분기	• 2023. 2.: 지반조사 용역 완료 및 설계공모 공고 • 2023. 3.: 사상재생사업지구계획 변경 환경보전방안검토 용역 완료
2023년 2분기	• 2023. 5.: 설계공모 당선작 선정 및 전시회 개최 • 2023. 6.: 설계용역 착수 * 착수보고회 개최(6.12.)
2023년 3분기	• 2023. 9.: 실시설계 용역 중간보고회 개최(9.22.)
2023년 4분기	• 2023. 11.: 엄궁유수지 복합문화체육센터(공공도서관)건립사업 주민설명회 개최
2024년 1분기	• 2024. 2: 건설기술심의(설계심의) 완료
2024년 2분기	• 2024. 6.: 설계의 경제성 검토(V.E) 시행
2024년 3분기	• 2024. 8.: 설계용역 최종보고회 개최(8.28.)
2024년 4분기	• 2024. 11.: 설계용역 준공 및 공사 발주
2025년 1분기	• 2025. 2.: 건립공사 착공

□ 문제점 및 대책

○ 2020년 교부받은 균특(1,334백만 원)이 2회계 연도 초과이월이 불가함에 따라, 2회 추경 시 보조금 반환 예정

○ 반납분에 대한 지방비 추가 확보 대책 마련 필요: 市 소관부서와 지속 협의

□ 향후 추진계획

○ 2025. 10. ~ 2027. 8.: 내부 인테리어 설계 및 공사 추진

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-