3-1		CCTV 확충과 빈틈없는 관제로 촘촘한 감시망 구축

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 ■ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	안전총괄과 민방위관제팀	담당자	김태환(☎4742)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 市·區 방범용CCTV 설치·보강

○ 市·區 노후 방범용CCTV 교체

○ 카메라 대수 증가에 따른 정보시스템 보강

○ 빈틈없는 관제업무 수행

□ 사업내용

○ 관내 방범취약지역 내 방범용CCTV 설치·보강

○ CCTV통합관제센터 정보시스템(서버·스토리지 등) 보강

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내						임기 후
	2022		2023	2024	2025	2026.6월
방범용CCTV 설치공사
노후 방범용CCTV 교체
카메라 대수 증가에 따른 정보시스템 보강

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	3900.76	741	562.68	787.08	1,100	185	525	-
국 비	2,400	300	400	500	800	-	400	-
시 비	1,235.7	400	132.3	203.4	300	100	100	-
구 비	265.06	41	30.38	83.68	-	85	25	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ. 추진실적

□ 공약이행확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
통합관제센터 운영	• 市·區 방범용CCTV 설치·보강 • 市·區 노후 방범용CCTV 교체 • 카메라 대수 증가에 따른 정보시스템 보강 • 빈틈없는 관제업무 수행

□ 현재까지 추진경과

○ 市·區 방범용CCTV 설치·보강(75개소, 212대)

- 2022년 區 방범용CCTV 설치: 27개소(신규 15개소, 보강 12개소) 77대, 273.9백만원(21년 특별교부세)

- 2023년 區 방범용CCTV 설치: 29개소(신규 16개소, 보강 13개소) 85대, 322.2백만원(22년 특별교부세)

- 2022년 市 방범용CCTV 설치: 5개소(신규 4개소, 보강 1개소) 14대, 66백만원(시비)

- 2023년 엄궁동 재개발구역 방범용CCTV 보강: 12개소(신규), 30대, 37백만원(市 주민참여예산)

- 2024년 區 재난용CCTV 설치: 15개소(신규 12개소, 보강 3개소), 31대, 2985백만원(24년 특별교부세)

- 2024년 區 방범용CCTV 설치: 34개소(신규), 98대, 574백만원(23년 특별교부세)

- 2024년 市 방범용CCTV 설치: 1개소(신규), 4대, 17백만원(시비)

- 2024년 市 방범용CCTV 설치: 5개소(보강), 14대, 13백만원(시비)

- 2024년 區 방범용CCTV 설치: 3개소(신규), 8대, 57백만원(23년 특별교부세)

- 2025년 市 방범용CCTV 설치: 2개소(보강), 6대, 7백만원(市 주민참여예산)

○ 市·區 노후 방범용CCTV 교체(146개소, 150대)

- 2022년 市 노후 방범용CCTV 교체: 37개소, 37대, 66.3백만원(시비)

- 2023년 市 노후 방범용CCTV 교체: 89개소, 89대, 166.4백만원(시비)

- 2024년 市 노후 방범용CCTV 교체: 13개소, 13대, 27.9백만원(시비)

- 2023년 區 노후 방범용CCTV 교체: 20개소, 24대, 46.8백만원(22년 특별교부세 집행잔액, 구비)

- 2024년 區 노후 방범용CCTV 교체: 7개소, 8대, 57백만원(23년 특별교부세)

○ 카메라 대수 증가에 따른 정보시스템 보강

- 2022년 통합관제센터 서버 및 운영소프트웨어 등 구매: 126.2백만원(21년 특별교부세)

- 2023년 통합관제센터 서버 및 영상저장장치(스토리지) 등 구매: 154.5백만원(22년 특별교부세)

- 2022년 통합관제센터 운영소프트웨어 및 영상저장장치(스토리지) 구매: 29.4백만원(구비)

- 2023년 통합관제센터 데이터베이스 서버 및 영상저장장치(스토리지) 구매: 54.2백만원(구비)

- 2024년 통합관제센터 운영소프트웨어 및 영상저장장치(스토리지) 등 구매: 168백만원(23년 특별교부세)

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	25	25	25	35	40	55	60	80	★100	★100	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 2022. 6.: CCTV통합관제센터 서버/저장장치 구매 및 설치사업 관급자재 구매 • 2022. 7.: 가상화서버 부속품 및 가상화 소프트웨어 구매 • 2022. 8.: 사상구 방범용CCTV 15단계 구축공사 준공 부산시(사상구)방범용CCTV 노후 카메라 교체(1차) 17개소 • 2022. 6~8.: 개인정보보호 보안 및 직무교육 실시(3회) • 2022. 9.: 2022년 사상구 방범용CCTV 구축사업 준공 • 2022. 11.: 부산시(사상구)방범용CCTV 노후 카메라 교체(2차) 20개소 방범용CCTV망 정비 및 자가망 전환 공사 착공 • 2022. 9~12.: 개인정보보호 보안 및 직무교육 실시(3회)
2023년 1분기	• 2023. 2.: 방범용CCTV 설치대상지 현장조사 및 운영협의회 개최 • 사상구 방범용CCTV 노후 카메라 교체 10개소 • 2023. 3.: 부산시(사상구) 방범용CCTV 노후 카메라 교체 53개소 CCTV 통합관제센터 영상저장장치(스토리지) 및 데이터베이스 구매·설치 CCTV 통합관제센터 UPS 노후 배터리 교체 • 2023. 1~3.: 개인정보보호 보안 및 직무교육 실시(3회)
2023년 2분기	• 2023. 4.: CCTV 통합관제센터 보안 소프트웨어 구매·설치 CCTV 통합관제센터 USB 포트락 및 락키 구매·설치 • 2023. 5.: 부산시(사상구) 방범용CCTV 노후 카메라 교체(2차) 36개소 엄궁동 재개발지역 인근 고정형 CCTV 보강 12개소(주민참여예산) CCTV 통합관제센터 정보시스템 보강(저장장치, 가상화서버 등) • 2023. 6.: 사상구 방범용CCTV 설치공사 착공 • 2023. 4~6.: 개인정보보호 보안 및 직무교육 실시(3회)
2023년 3분기	• 2023. 7.~8: 사상구 방범용CCTV 설치공사 – 건설재해예방 기술지도 용역실시 • 2023. 8.: 사상구 방범용CCTV 설치공사- 관급자재 납품완료 • 2023. 9.: 사상구 방범용CCTV 설치공사 준공 • 2023. 7~9.: 개인정보보호 보안 및 직무교육 실시(3회)
2023년 4분기	• 2023. 11. ~ 12.: 사상구 방범용CCTV 노후 카메라 교체(2차)(10개소) • 2023. 10~12.: 개인정보보호 보안 및 직무교육 실시(3회)
2024년 1분기	• 2024. 3.: 부산시(사상구)방범용CCTV 노후 카메라 교체 13개소 • 2024. 3.: 2024년 방범용CCTV 설치 설계용역 준공 • 2024. 1~3.: 개인정보보호 보안 및 직무교육 실시(3회)
2024년 2분기	• 2024. 4.: 학장천·삼락천 CCTV 설치·보강 실시설계 용역 • 2024. 5.: 2024년 방범용 및 학장천·삼락천 CCTV 설치 공사 착공 • 2024. 6.: CCTV 관제센터 정보시스템 보강 • 2024. 4~6.: 개인정보보호 보안 및 직무교육 실시(3회)
2024년 3분기	• 2024. 8.: 학장천·삼락천 CCTV 설치·보강 공사 준공 • 2024. 9.: 2024년 방범용 및 학장천·삼락천 CCTV 설치 공사 준공 • 2024. 7~9.: 개인정보보호 보안 및 직무교육 실시(3회)
2024년 4분기	• 2024. 10~11.: 부산시(사상구)방범용CCTV 구축사업(17단계)1개소 신규설치 • 2024. 10~12.: 부산시(사상구)방범용CCTV 구축사업(18단계)5개소 보강설치 • 2024. 10~12.: 2024년 사상구 방범용 CCTV 설치∙교체 공사 준공
2025년 1분기	• 2025. 3.: 모샛길 굴다리 고정형 CCTV 보강 2개소(주민참여예산)

□ 문제점 및 대책

○ 지속적으로 증가하는 카메라 대수에 비해 관제요원 인력 미증가로 충원 필요

- 현재 1,603대(방범용CCTV+교육청)의 카메라를 16명, 4조 3교대로 관제 중이며, 1인당 평균 400대 카메라를 관제하고 있는 실정임

○ 영상분석의 효율성 및 정확성 향상을 위해 지능형 관제 시스템 도입 검토

□ 향후 추진계획

○ 2025년 市 방범용CCTV 18단계 2차 구축사업(시재배정)

- ‘25.  3. 설치대상지 선정 및 행정예고

- ‘25.  5. 공사 발주 및 착공

- ‘25.  7. 공사 준공

○ 2025년 사상구 방범용 CCTV 설치 및 노후카메라 교체: 11개소(5개소 신규, 6개소 교체)

- ‘25.  8. 설치대상지 선정 및 행정예고

- ‘25.  9. 공사 발주 및 착공

- ‘25. 11. 공사 준공

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	2(위원회)	-	-