5-1		백양산 산림휴양 레포츠 타운 조성

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	■ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	□ 예산 ■ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	녹지공원과 경관생태팀	담당자	노신영 (☎5142)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 모라동 산33번지 일원(모라예비군훈련장)

○ 기    간: 2022년 11월 ~ 2027년 12월

○ 소요예산: 250억원(국비)

○ 사업내용: 국립자연휴양림 조성

□ 사업내용

○ 숲속 야영시설, 산림체험·교육시설, 산림레포츠 시설 조성

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022.7.	2023	2024	2025	2026.6.
예비군훈련장 내 사유지 매입
실시설계 및 기반공사
공사착공 및 준공

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	25,000	-	-	500	1,109	1,000	5,991	16,400
국 비	25,000	-	-	500	1,109	1,000	5,991	16,400
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ. 추진실적

□ 공약이행확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
백양산 산림휴양 레포츠 타운 조성	• 국립 백양산 자연휴양림 조성 공사 시행

□ 현재까지 추진경과

○ 2022. 7. : 국립백양산자연휴양림 조성 건의(市→산림청)

○ 2022.11. : 산림청 사전입지조사 용역 실시(‘22.11.16.~’23.5.4.)

○ 2023. 5. : 사전입지조사 용역 및 타당성평가 완료

○ 2023. 6. : MOU체결(국방부·산림청·사상구)

○ 2023. 6. : 휴양림 1구간(모라동산33) 지정·고시

○ 2023. 7. : 산림청 기본구상용역 실시(~`24.3.)

○ 2023.11. : 해운대구 53사단 건축(증축) 행위 허가 승인

○ 2024. 3. : 조성 예정지(모라예비군훈련장) 내 사유지 매입 완료(7필지)

○ 2024. 3. : 진입도로 도시관리계획(시설:도로) 결정 용역 착수

○ 2024. 6. : 산림청 실시설계용역 실시(~`24.10.)

○ 2024. 7. : 진입도로 개설공사 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2024. 9. : 모라예비군훈련장 토양정밀조사 진행(~`25.3.)

○ 2024. 9. : 진입도로 개설공사 지반조사 용역 착수

○ 2024. 10 : 도시관리계획(도로) 결정 재해영향성검토 용역 착수

○ 2024. 12 : 산림청 토목공사 착공(~`25.12.)

※ 예산 확보에 따른 단계별 사업 진행

- 산림청 부지(모라동 산33)에 1차 사업(86억 규모) 진행 후, 모라예비군훈련장(‘25년 말) 이전 후 2차 사업(164억 규모) 진행(예정)

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	-	-	20	30	35	40	45	45	60	80	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	-
2023년 1분기	-
2023년 2분기	국립백양산자연휴양림 조성을 위한 업무협약 체결
2023년 3분기	휴양림 1구간(모라동33) 지정·고시, 기본구상용역 진행
2023년 4분기	해운대구 53사단 건축(증축) 행위 허가 승인
2024년 1분기	모라예비군 훈련장 내 사유지 매입 완료(7필지)
2024년 2분기	1차 사업 실시설계용역 착수
2024년 3분기	모라예비군훈련장 토양정밀조사 진행
2024년 4분기	1차 사업 실시설계용역 완료, 토목공사 착공
2025년 1분기	산림청 국립자연휴양림관리소 1차 사업 실착공 시행

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 2025. 1.~12.: 1차 사업 토목공사 준공(예정)

○ 2025. 1.~12.: 진입도로 도시관리계획 결정 및 토지보상 등 행정절차 이행

○ 2025. 12.: 모라예비군훈련장 이전(예정)

○ 2026. ~ 2027: 1차 사업 건축공사 착공 및 준공(예정)

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	-	-	14	-

○ 설명회/ 설문조사/ 전문가 자문

구 분	내 용	관련사진
설명회	○ 일 시: 2023. 6. 8. ○ 장 소: 사상구청 신바람홀 ○ 대 상: 사업 관계기관, 구민 ○ 내 용: 국립백양산자연휴양림 조성을 위한 업무협약 체결

○ 언론·방송보도

부산일보(2023. 6. 8.)	연합뉴스(2023. 6. 8.)
뉴스1(2023. 6. 8.)	KNN(2023. 6. 8.)
국제신문(2023. 6. 8.)	부산mbc(2023. 6. 8.)
디지털타임스(2023. 6. 8.)	조이뉴스(2023. 6. 8.)
팍스경제(2023. 6. 8.)	부산일보(2023. 6. 8.)
국제뉴스(2023. 6. 8.)	한국일보(2023. 6. 9.)
시장경제(2023. 6. 13.)	sk브로드밴드(2023. 6. 14.)