5-8-1		삼락천변 쉼터 조성, 침수위험 해소 삼락천변 쉼터 조성

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 ■ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	도시관리과 하천생태팀	담당자	양주성(☎4682)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 교량주변 쉼터 공간 조성

- 소요예산 : 3,746백만 원(국비:지방비 / 5:5)

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년

- 사업내용 : 삼락천 교량 주변 보행자 안전통로 확보 및 삼락천 이용 주민을 위한 쉼터를

조성하여 편안하고 친숙한 하천 친수공간 조성

- 위    치 : 삼락수로 3호교, 4호교, 5호교

- 규    모

‣ 교량확장: 1,000㎡, 주야간경관개선: 880m, 쉼터조성: 3개소, 공연∙전시시설 조성

위 치	3호교 쉼터
4호교 쉼터	5호교 쉼터

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내								임기 후
	2022.7.		2023	2024		2025		2026.6.
교량 안전보행로 확충공사
도시재생사업 공모 신청 및 선정
市 도시재생위원회 심의
현황조사 및 기본 · 실시설계
공사착공 및 준공

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	3,746.0						280	3,466.0
국 비	1,873.0						140	1,733.0
시 비	936.5						70	866.5
구 비	936.5						70	866.5
기 타

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
삼락천변 쉼터 조성	• 실시설계 용역 완료

□ 현재까지 추진경과

○ ‵22. 10.: 삼락천 교량 보행자 안전 통행로 확충(삼락천 강변 도심보행길 조성공사)

○ ‵23. 03.: 삼락천 교량 보행자 안전 통행로 확충(낙동제방~삼락천 간 보행로 연결공사)

○ ‵23. 09.: 국토부 도시재생사업(특화재생) 공모 신청 ※ 도시재생과 → 市 창조도시과

○ ‵23. 12.: 국토부 도시재생사업(특화재생) 공모 선정 ※ 총 사업비 317.5억

○ ‵24. 04.: 市 도시재생위원회 심의

○ ‵24. 06.: 덕포시장 일원 도시재생활성화계획 고시

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	-	10	15	15	15	25	25	25	25	25	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 삼락천 교량 보행자 안전통로 확충(삼락천 강변 도심보행길 조성공사)
2023년 1분기	• 삼락천 교량 보행자 안전통로 확충(낙동제방~삼락천 간 보행로 연결공사)
2023년 2분기	• 추진사항 없음
2023년 3분기	• 국토부 도시재생사업 공모 신청
2023년 4분기	• 국토부 도시재생사업 공모 선정
2024년 1분기	• 공약사업내용 변경(도시재생과 사업 연계 추진)
2024년 2분기	• 추진사항 없음
2024년 3분기	• 추진사항 없음
2024년 4분기	• 추진사항 없음
2025년 1분기	• 추진사항 없음

□ 문제점 및 대책

○  효율적인 공약 이행을 위해 도시재생과 삼락∙덕포동 도시재생사업과 연계하여 사업 추진

□ 향후 추진계획

○ 2025. 하반기  : 현황조사 및 기본설계 용역 추진

○ 2026. ~ 2027. : 공사 착공 및 준공

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

5-8-2		삼락천변 침수위험 해소

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	■ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	건설과 하수관리팀	담당자	송명석 (☎5132)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 삼락천 유역 일원

○ 사업규모: 삼락천 일원 하도 및 관로 정비 등

○ 사 업 비: 45,500백만원

○ 사업기간: 2022 ~ 2027

□ 사업내용

□ 추진경과

○ 2021. 9.: 삼락지구 자연재해위험개선지구 지정 고시 및 사업선정

○ 2022. 3.: 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2023. 9.: 행정안전부 사전설계검토(기본설계) 심의

○ 2024. 3.: 삼락지구 자연재해위험개선지구 지정(변경) 고시

○ 2024. 9.: 행정안전부 사전설계검토(실시설계) 심의

○ 2025. 2.: 행정안전부 사전설계검토(실시설계) 추가 심의

○ 2025. 3.: 행정안전부 사전설계검토(실시설계) 관련 조치계획서 제출

□ 향후계획

○ 2025. 4.: 지방건설기술심의, 계약심사 등

○ 2025. 6. ~ 2027. 6.: 공사 시행

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내								임기 후
	2022		2023		2024	2025		2026.6.
기본 및 실시설계 용역 시행 (사전설계검토, 설계VE 등 행정절차 포함)
공사 시행

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	45,500	-	3,360	5,835	3,200	500	5,700	26,905
국 비	22,750	-	1,140	3,890	1,600	250	2,850	13,020
시 비	11,375	-	1,650	-	800	125	1,425	7,375
구 비	11,375	-	570	1,945	800	125	1,425	6,510
기 타

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
삼락지구 자연재해위험개선지구 정비사업	• 삼락지구 자연재해위험개선지구 정비사업 공사 시행

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	10	20	30	40	50	60	70	80	80	80	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 3분기	• 기본설계 사전설계검토 완료
2023년 4분기	• 기본설계 사전설계검토 조치계획서 제출
2024년 1분기	• 재난신기술 관련 공법 심의 • 자연재해위험개선지구 지정(변경) 고시
2024년 2분기	• 부산시 설계VE 완료 • 실시설계 사전설계검토(실시설계) 사전협의
2024년 3분기	• 실시설계 사전설계검토(실시설계) 심의
2024년 4분기	• 실시설계 사전설계검토(실시설계) 추가 검토 관련 사전협의
2025년 1분기	• 실시설계 사전설계검토(실시설계) 추가 검토 관련 사전협의

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ ’25. 04.: 부산광역시 건설기술심의(설계 및 공사기간 적정성 검토 심의), 계약심사, 공사 발주 등

○ ’25. 06.~: 공사 시행

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	-	-	-	-

○ 설명회/ 설문조사/ 전문가 자문

구 분	내 용	관련사진
설명회	○ 일 시: 2024. 2. 8.(목) 11:00~12:00 ○ 장 소: 덕포1동 행정복지센터 ○ 대 상: 침수피해지역 주민 ○ 내 용: 사업계획 및 사업필요성 설명

5-8-3		삼락천변 쉼터 조성, 침수위험 해소 침수지역 내 하수 BOX, 측구 및 집수정 등 준설

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 ■ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	안전총괄과 예방복구팀 건설과 하수관리팀	담당자	권정결(☎4644) 장주희(☎5129)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 우수기 상습침수지 준설사업: 2 ∼ 3개소【매년(우수기 전)】

○ 주요 복개구조물(하수BOX) 내부 준설공사: 매년(우수기 전)

○ 운산천 복개구조물 외 3개소 준설공사(V=620㎥, W=738ton)

	<’22~24년 추진실적>
☞ 삼락천변 상습(덕포시장 등) 일원 측구 준설 - 가야대로 일원 상습침수지 준설사업: L=1,104m, V = 296㎥, W = 518ton - 덕포시장 일원 등 주거지역 골목길 준설사업: L=956m, V = 147㎥, W = 176ton ☞ 감전1·2·3중천, 감전유수지지류, 운산천, 학장천지류 하수BOX 준설 - 감전제1중천 외 3개소 준설공사: V=652㎥ W=775ton(2022년) - 감전유수지지류 외 3개소 준설공사: V=749㎥ W=891ton(2023년) - 학장천지류 외 3개소 준설공사: V=714㎥ W=850ton(2024년)

□ 사업내용

○ 삼락천변 일원 침수위험 해소를 위한 준설(하수BOX, 측구 및 집수정 등 준설)

○ 민원 발생지역 자체 준설(수시)

- 사업기간: 연중 계속

- 대상지역: 관내 전역 (민원발생 및 긴급 준설 요구 지역 등)

- 준설장비/인력: 준설차량 2대, 준설 팀 편성 운영(공무직 도로관리원 5명)

○ 구글맵을 활용한 준설지도 빅데이터 구축

- 기간/지역: 연중(지속추진), 관내 준설완료지역

- 사 업 비: 비예산 사업

- 목    적: 침수예상지 파악 및 향후 준설대상지 선정 시 활용

- 관리정보: 자체준설(2,132건), 용역준설(20건), 복개구조물 준설(10건) 등

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026.6월
하수BOX 준설
우수기 상습침수지 준설
자체 준설(수시)

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	4,380	350	450	700	720	720	720	720
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비		-	-		-	-	-	-
구 비	4,380	350	450	700	720	720	720	720
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
주요복개구조물(하수BOX) 내부 준설공사	• 준설공사 준공
우수기 상습침수지 준설사업	• 준설공사 준공

□ 현재까지 추진경과

○ 23. 7. 운수천 복개구조물 준설공사 준공 : 준설량(V=435㎥)

○ 23. 7. 우수기 상습침수지 준설공사 준공: 삼락동 : L=724.6m, V=76㎥

○ 감전제1중천 복개구조물 외 3개소 준설공사(‘22. 1. ~ ’23. 6.)

○ 감전유수지지류 복개구조물 외 3개소 준설공사(’22. 11. ~ ‘23.6.)

○ 학장천지류 복개구조물 외 3개소 준설공사(’24. 1. ~ ‘24 .6.)

○ 2024년 우수기 상습침수지 준설공사(’24. 4. ~ ‘24. 7.)

○ 주거지역 골목길 준설공사(’24. 4. ~ ‘24. 8.

구 분	내 용	관련사진 (‘22~‘24)
구글 준설지도	- ‘21까지 1,383건 입력 완료, 이후 지속적으로 관리, 추가 입력 및 데이터 강화 - ’22 : 강변대로(감전교차로~북구 경계) 외 자체준설 370건, W=1206ton (L=5,575m) - ’23 : 강변대로(야마하~비상, 건축자재상가~엄궁 양념류 도매시장) 외 자체준설 393건, W=979ton (L=8,780m) - ’24 : 사상로330~사상로389 일대 외 자체준설 208건, W=1250ton (L=9,440m)

○ 구글맵을 활용한 준설지도 빅데이터 구축

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 2022. 9.~12.: 자연재해위험개선 삼락지구 정비사업 업무추진(총괄) 감전배수장 준설공사준공(V=21㎥) 우수기 상습침수지 준설공사 사업대상지 공모 및 현장확인 • 2022. 12. : 운수천 복개구조물 준설공사 실시설계용역 착수
2023년 1분기	• 2023. 2~3.: 운수천 복개구조물 준설공사 실시설계용역 완료 및 착공 우수기 상습침수지 준설공사 실시설계용역 완료
2023년 2분기	• 2023. 4~6.: 운수천 복개구조물 준설공사 준공(V=435㎥) 우수기 상습침수지 준설공사 진행중 (삼락동 : L=724.6m, V=76㎥)
2023년 3분기	• 2023. 7.: 우수기 상습침수지 준설공사 준공
2023년 4분기	-
2024년 1분기	• 2024. 1.: 학장천지류 복개구조물 외 3개소 준설공사 실시설계용역 착수 • 2024. 2.: 하수구 준설공사 용역 대상지 공모 및 현장확인 • 2024. 3.: 학장천지류 복개구조물 외 3개소 준설공사 실시설계용역 준공 및 공사 발주
2024년 2분기	• 2024. 4.: 학장천지류 복개구조물 외 3개소 준설공사 공사 착공 • 2024. 6.: 학장천지류 복개구조물 외 3개소 준설공사 공사 준공 • 2024. 4.: 우수기 상습침수지 준설공사 실시설계용역 착수 • 2024. 6.: 우수기 상습침수지 준설공사 실시설계용역 준공 및 공사 발주
2024년 3분기	• 2024. 8.: 우수기 상습침수지 준설공사 준공
2024년 4분기	-
2025년 1분기	• 2025. 1.: 2025 사상구 하수관로 준설공사(단가계약) 발주 • 2025. 2.: 주거지역 골목길 하수구 준설공사 용역 대상지 공모 및 현장확인 • 2025. 3.: 삼락천변 일원 하수관로 준설공사 등 발주 • 2025. 3.: 운산천 복개구조물 외 3개소 준설공사 공사 발주 • 2025. 4.: 운산천 복개구조물 외 3개소 준설공사 공사 착공

□ 문제점 및 대책

○ 삼락지구 자연재해위험개선지구(침수구역) 대상지(A=783,764㎡)가 방대하여 사업기간 장기소요 ☞ (5년)

▶ 침수구역개선 사업추진(건설과), 하수BOX 준설공사(안전총괄과) 분리 추진

□ 향후 추진계획

○ ’25. 4. ~ : 삼락천변 일원 하수관로 준설공사 등 공사추진

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-