5-9		미세먼지 악취저감 대책 추진

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	■ 완료 □ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	환경위생과 환경지도팀	담당자	노다지 (☎4398)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 기    간: 2022. 7. ~ 2024. 12.

○ 총사업비: 3,330백만 원(국비 1,726, 시비 1,463.5, 구비 140.5)

○ 주요내용: ① 『오늘 사상구는?』환경알리미 설치(20백만 원)

② 『노후 악취모니터링시스템』 교체(180)

③ 『미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원』 운영(230)

④ 『영세공장 미세먼지ㆍ악취저감시설』 설치 지원(2,900)

□ 사업내용

○ 「오늘 사상구는?」 환경알리미 설치

- 기간 및 위치: ’23. 상반기, 낙동강 벚꽃길 등 다중이용시설(2개소)

- 내 용: 미세먼지ㆍ악취현황 및 미세먼지 경보 등 표출 모니터 설치

- 소요예산: 20백만 원(구비)

○ 「노후 악취모니터링시스템」 교체

- 기간 및 대상: ’22. ~ ’24., 캐스텍코리아 등 15개소

- 내 용: 현장 운영 중인 악취관측장비를 신규 장비로 교체

- 소요예산: 180백만 원(시비 117, 구비 63)

○ 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 운영

- 기간 및 인원: ’22. ~ ’24., 2명(구민, 환경 관련 자격증 보유자 등)

- 내 용: 공업지역 내 환경오염행위 감시순찰 및 단속물품 구매 등

- 소요예산: 230백만 원(국비 115, 시비 57.5, 구비 57.5)

○ 『영세공장 미세먼지ㆍ악취저감시설』 설치 지원

- 기간 및 대상: ’22. ~ ’23., 49개소(미세먼지ㆍ악취 다량 배출업소)

- 내 용: 미세먼지ㆍ악취 등 저감시설 설치를 위한 기술ㆍ자금 지원

- 소요예산: 2,900백만 원(국비 1,611, 시비 1,289)

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내						임기 후
	2022		2023	2024	2025	2026.6월
「오늘 사상구는?」 환경알리미 설치
노후 악취모니터링시스템 교체
미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원 운영
영세공장 미세먼지ㆍ악취 저감시설 설치 지원

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	3,330		1,224	1,956	150
국 비	1,726		650	1,038	38
시 비	1,464		539	858	67
구 비	140		35	60	45
기 타

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
미세먼지 악취저감 대책추진	• 「오늘 사상구는?」 환경알리미 설치[’23.상반기, 2개소, 20백만원(구비)] • 「노후 악취모니터링시스템」 교체[’22.~’24., 15개소, 180백만원(시ㆍ구비)] • 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 운영[’22.~’24., 2명, 230백만원(국ㆍ시ㆍ구비)] • 『영세공장 미세먼지ㆍ악취저감시설』 설치 지원[’22.~’23., 49개소, 2,900백만원(국ㆍ시비)]

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	’22.4분기	’23.1분기	’23.2분기	’23.3분기	’23.4분기	’24.1분기	’24.2분기	’24.3분기	’24.4분기
추진율(%)	30	50	60	70	80	85	93	95	★100

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 2022. 7.~12.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 운영(2명) • 2022. 7.~12.: 「노후 악취모니터링시스템」 교체완료(4개소) • 2022. 7.~12.: 「영세공장 미세먼지ㆍ악취저감시설」 선정 및 지원(21개소)
2023년 1분기	• 2023. 1.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 1명 채용ㆍ운영 • 2023. 2.: 「영세공장 미세먼지ㆍ악취저감시설」 설치 지원 계획 수립 • 2023. 3.: 「영세공장 미세먼지ㆍ악취저감시설」 신청접수(61개소 신청) • 2023. 3.: 「오늘 사상구는?」환경알리미 구매 계약 및 제작 중 • 2023. 3.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 1명 추가 채용 공고 및 선발
2023년 2분기	• 2023. 6.: 「오늘 사상구는?」환경알리미 구매완료(2대) • 2023. 4.~6.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 운영(2명) • 2023. 6.: 「노후 악취모니터링시스템」 교체완료(6개소) • 2023. 4.~6.: 「영세공장 미세먼지ㆍ악취저감시설」 지원대상 평가선정(28개소)
2023년 3분기	• 2023. 8.: 「오늘 사상구는?」환경알리미 설치완료 • 2023. 7.~9.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 운영(2명) • 2023. 8.: 「노후 악취모니터링시스템」 ’24년 시비 편성 요구 • 2023. 7.~9.: 「영세공장 미세먼지ㆍ악취저감시설」 선정업체 시설설치
2023년 4분기	• 2023. 10.~12.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 운영(2명) • 2023. 10.~12.: 「영세공장 미세먼지ㆍ악취저감시설」 설치완료 시 자금지원
2024년 1분기	• 2024. 1.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 1명 채용ㆍ운영 • 2024. 1.~3.: 「노후 악취모니터링시스템 교체」예산교부 및 행정절차 이행, 입찰공고
2024년 2분기	• 2024. 4.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 1명 추가 채용ㆍ운영(총 2명) • 2024. 4.~6.: 「노후 악취모니터링시스템 교체」 금년도 교체대상 5대 중 4대 교체완료
2024년 3분기	• 2024. 7~9.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 1명 추가 채용ㆍ운영(총 2명)
2024년 4분기	• 2024. 10~12.: 「미세먼지ㆍ악취 불법배출 감시원」 운영 완료(2명) • 2024. 10.~11.: 「노후 악취모니터링시스템 교체」 1대 교체완료 및 최종 사업완료

□ 문제점 및 대책

○ ’24.12.31. 기준, 전체 사업완료

□ 향후 추진계획

○ 시설 정상 운영 및 유지보수비 등 확보(국ㆍ시비 등)

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-