7-4		모라주공 1·3단지 연결 엘리베이터 추가 설치

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 □ 사상구 ■ 기타(LH)	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	■ 완료 □ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	건설과 토목1팀	담당자	김윤준 (☎4696)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 모라동 552번지 일원(모라주공 APT 1․3단지 일원)

○ 규    모: 엘리베이터 및 보도교 설치 1개소(H=20m, L=30m)

○ 사 업 비: 2,500백만 원(공사 2,450, 설계 50)

□ 사업내용

○ 모라주공아파트 1·3단지를 연결하는 교통약자 편의시설 추가 설치를 통한 교통약자 등      보행편의 증대

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022.7.	2023	2024	2025	2026.6.
관련기관 협의
공사추진(LH)

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	2,500			2,500
국 비
시 비
구 비
기 타 (특교세)	2,500			2,500

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
모라주공 1·3단지 연결 엘리베이터 추가 설치	•모라주공 1・3단지 연결 엘리베이터 추가 설치 완료

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	2022.4분기	2023.1분기	2023.2분기	2023.3분기	2023.4분기	2024.1분기	2024.2분기	2024.3분기	2024.4분기
추진율(%)	0	5	15	20	20	30	70	95	★100

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1분기	• 2023. 3.: 실시설계 착수
2023년 2분기	• 엘리베이터 설치 인·허가 요청(LH → 區)
2023년 3분기	• 설계 진행
2023년 4분기	• 공사 발주 (LH)
2024년 1분기	• 공사 진행
2024년 2분기	• 공사 진행
2024년 3분기	• 공사 진행
2024년 4분기	• 공사 준공

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음.

□ 향후 추진계획

○  2024. 10. 공사 준공

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-