7-6		부산여성프라자 건립

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	복지정책과 가족정책팀	담당자	김태민(☎4362)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 추진근거: 양성평등기본법 제45조 및 사상구 양성평등 기본 조례 제19조

○ 위    치: 신축 예정인 괘법동복합행정복지센터 내

○ 사업기간: 2023 ~ 2027

□ 사업내용

○ 신축 예정인 괘법동복합행정복지센터 내 여성(가족)프라자 및 가족공간 확보

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내							임기 후
	2022		2023		2024	2025	2026.6월
부산여성프라자 건립 기본계획수립 용역 추진
부산여성(가족)프라자 공간확보 - 괘법동행정복지센터(신청사) 실시계획 설계에 반영

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	22			22
국 비
시 비
구 비	22			22
기 타

Ⅱ. 추진실적

□ 공약이행확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
부산여성프라자 건립	• 부산여성(가족)프라자 공간 확보 ▶ 괘법동행정복지센터(신청사) 실시계획 설계에 반영

□ 현재까지 추진경과

○ 우수기관 벤치마킹

- 2022.  7. 25. 1차 서울시 중구·서초구잠원·서초센터

- 2022. 10. 24. 2차 서울시 송파구·도봉구

○ 부산여성프라자 건립 기본계획수립 연구용역 실시

- 2022.  6. 24. 부산여성프라자 건립 연구용역 추진 계획 수립

- 2022. 12. 14. 연구용역 착수보고회

- 2023.  6.  1. 연구용역 중간보고회

- 2023.  7. 24. 연구용역 최종보고회

○ 중부산 농협 건축물(부지) 등 새로운 대상지 검토 – 2024.01.

○ 공약 실천계획 및 이행확인지표 변경 검토 – 2024.9.

○ 공약 실천계획 및 이행확인지표 변경 건의 – 2024.11.

○ 공약 실천계획 및 이행확인지표 변경 – 2024.12.

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	5	10	20	20	20	5	5	5	30	30	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	우수기관 벤치마킹(7.25. 10.24.) 부산여성프라자 건립 기본계획수립 연구용역 착수보고회 개최(12.14.)
2023년 1분기
2023년 2분기	부산여성프라자 건립 기본계획수립 연구용역 중간보고회 개최(6.1.)
2023년 3분기	부산여성프라자 건립 기본계획수립 연구용역 최종보고회 개최(7.24.) (건립 대상지 선정 –덕포1동 행정복지센터 일원)
2023년 4분기	-
2024년 1분기	중부산 농협 건축물(부지) 등 새로운 대상지 검토
2024년 2분기	새로운 대상지 검토 중
2024년 3분기	공약 실천계획 및 이행 확인지표 변경 검토 – 부산여성(가족)프라자 공간확보
2024년 4분기	공약 실천계획 및 이행 확인지표 변경
2025년 1분기	(괘법동 신청사) 부지 감정평가 및 보상금 산정

□ 문제점 및 대책

○ 괘법동 복합행정복지센터 건립 기본계획에 포함, 세부 공간 구성(안) 마련

□ 향후 추진계획

○ 괘법동 복합행정복지센터 건립 실시설계에 반영

▶ 괘법동 신청사 건립 추진일정

- 2025.: 부지 매입 및 토지보상

- 2025. 하반기 ~　2026. 상반기: 기본 및 실시설계 용역

- 2026. ~ 2027.: 건축공사

- 2027.:  청사준공

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	1	2	-	-

○ 전문가 자문

구 분	내 용	관련사진
전문가 자 문	○ 일 시: 2023. 6. 1. ○ 장 소: 영상회의실 ○ 대 상: 구청장, 부구청장, 부산여성가족개발원 등 ○ 내 용: 입지여건 분석 및 기본구상(안), 중장기 운영방향 등
전문가 자 문	○ 일 시: 2023. 7. 24. ○ 장 소: 영상회의실 ○ 대 상: 구청장, 부구청장, 부산여성가족개발원 등 ○ 내 용: 기본구상 최종(안), 중장기 운영방향 등