8-10		괘내 생태문화마을 조성(완료)

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	■ 완료 □ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	(부서) 도시재생과 (팀)도시재생기획팀	담당자	지상봉 (☎4942)
			정미령 (☎4944)
			박운필 (☎4947)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 사업규모

- 사 업 지: 괘법동 468번지 일원, A=56,549㎡

- 사 업 비: 9,723백만원(국비 4,730, 시비 2,365, 구비 2,628)

□ 사업내용

○ 주거복지 실현: 순환형 공공임대 주택 조성, 노후주택 정비사업, 클린하우스 조성

○ 마을활력 기반 구축: 경부선 철로변 경관개선사업, 괘내IN블랙박스 사업, 괘내마을 오아시스 사업

○ 공동체 회복 및 일자리 창출: 행복충전소 조성, 친환경 마을농장 조성, 마을DNA발전사업

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022.7.	2023	2024	2025	2026.6.
주거복지실현
마을활력기반 구축
공동체 회복 및 일자리 창출

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	9,723	7,287	2,436
국 비	4,730	4,009	721
시 비	2,365	880	1,485
구 비	2,628	2,398	230
기 타

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
주거복지실현	• 순환형 공공임대주택 • 노후주택 정비 • 클린하우스 조성
마을활력 기반 구축	• 경부선 철로변 경관개선사업 • 괘내IN블랙박스 사업 • 괘내마을 오아시스 사업
공동체 회복 및 일자리 창출	• 행복충전소 조성 • 친환경 마을농장 조성 및 운영 • 마을DNA발전사업

□ 현재까지 추진경과

○ ‘19. 10.: 도시재생 뉴딜사업(우리동네살리기형) 공모 선정

○ ‘22.  3.: 친환경 마을농장 운영 착수

○ ‘22.  9.: 마을관리사회적협동조합 설립 완료

○ ‘22. 12.: 괘내마을 행복충전소 및 순환형 공공임대주택 조성 사업 준공

○ ‘23.  5.: 괘내IN블랙박스 사업 준공, 주민역량강화교육 운영 완료

○ ‘23. 10.: 노후주택정비 사업 착공

○ ‘23. 10.: 괘내마을 오아시스 조성 사업 준공

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	2022.12.31.	2023.1분기	2023.2분기	2023.3분기	2023.4분기
추진율(%)	60	70	80	90	100

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 22.12.: 행복충전소 및 순환형 공공임대주택 조성사업 준공
2023년 1분기	• 22. 3.: 스마트팜 조성 용역 준공
2023년 2분기	• 23. 4.: 행복충전소 카페 인테리어 공사 준공 • 23. 5.: 괘내IN블랙박스 사업 준공, 주민역량강화교육 운영 완료
2023년 3분기	• 23. 6.: 2023년 텃밭, 베이킹 체험 프로그램 운영 착수 • 23. 8.: 노후주택 정비사업 실시설계용역 완료
2023년 4분기	• 23.10.: 노후주택 정비사업 착공, 오아시스 조성사업 준공

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

○ ‘23. 12.: 노후주택 정비사업 및 클린하우스 조성, 경부선 철로변 경관개선사업 준공

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	-	3	4	66