8-11		지역산업 혁신거점 조성 지원

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 ■ 부산시+사상구 □ 사상구 ■ 기타	예 산	□ 예산 ■ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	미래청년기획단 비전추진팀	담당자	서경수 (☎5232)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ (위    치) 사상구 삼락동 380-17, 삼락중학교('19.3.폐교), 부산솔빛학교('23. 9.이전)

○ (규    모) 17,620.5㎡, 3필지(삼락중 폐교부지 9,324㎡, 솔빛학교 7,779㎡, 기타 518.5㎡)

○ (사 업 비) 2,210억 원 □LH 先투자 방식으로 진행

○ (개발용도) □ (산업) 탄성소재연구소(市) □ (주거) 일자리연계형지원주택

□ (업무·산업) 지식산업센터    □ (교육·연구) 공공임대산업시설

□ (기반시설) 주차장

□ 사업내용

○ 도시 내 노후공업지역의 활성화 및 지역산업 경쟁력 강화를 위한 지역산업 혁신거점 조성

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026.6월
산업혁신구역 지정, 실시계획 등 승인
조성 공사

□ 중앙정부 도움

○ 국토부 공업지역 활성화 시범사업 선정, LH선투자 방식으로 진행, 노후화된 공업지역 재생

및 지역혁신거점 조성

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
지역산업 혁신거점 조성 지원	• 사상 공업지역 활성화 시범사업 조성공사 착공

□ 현재까지 추진경과

○ ‘19.11.: 공업지역 활성화 시범사업 대상지 선정(국토교통부)

○ ‘20. 5.: 공업지역 활성화 시범사업 업무협약(市,사상구,LH)

○ ‘20. 9.: 삼락중,솔빛학교 부지 토지매각 MOU체결(사상구,LH,교육청,박영학원)

○ ‘21.12.: 입지규제최소구역 지정고시(市), 삼락중 토지매입(LH)

○ ‘22. 9.: 삼락중학교 철거(LH)

○ ‘23. 2.: 탄성소재연구소 기본 및 실시설계용역 착수(市)

○ ‘23.11.: 예비타당성조사 미통과(KDI:‘23.1.~11.)

○ ‘24. 3.: 기본계획 수립을 위한 입주시설(기관) 수요조사

○ ‘24. 3.: 산업혁신구역 공업지역정비사업 시행자 지정 및 실시계획 고시(市)

○ ‘24. 4.: 탄성소재연구소 건축허가 신청·접수

○ ‘24.12.: 탄성소재연구소 설계 완료

○ ‘25. 2.: 부산 공공 노후공업활성화 시범사업 기본계획 수립 및 사업타당성 용역 실시(LH)

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	5	8	9	11	11	30	40	60	80	95	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 삼락중학교 철거 및 타당성재조사 신청
2023년 1분기	• KDI 타당성재조사 대응 - KDI 현장실사, BDI(부산공공투자관리센터) 컨설팅, 보완 요구자료 제출 등
2023년 2분기	• KDI 타당성재조사 대응 - 시범사업 관련 관계기관 회의, 보완요구자료 제출 등
2023년 3분기	• KDI 타당성재조사 대응 - KDI 타당성재조사 중간보고회 참석, 관계기관 회의 등
2023년 4분기	• KDI 타당성재조사 대응 - 중간보고회 결과에 따른 보완자료 제출, 관계기관 합동 KDI 방문 등
2024년 1분기	• 시범사업 추진을 위한 입주시설 수요조사 및 관계기관 회의 등
2024년 2분기	• 탄성소재연구소 건축허가 신청·접수
2024년 3분기	• 탄성소재연구소 등 공용건축물 협의
2024년 4분기	• 탄성소재연구소 설계 완료
2025년 1분기	• 탄성소재연구소 착공 준비 및 탄성소재연구소 외 부지 기본계획 용역 실시

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

○ ’25. 4.  탄성소재연구소 착공

○ ‘26. 1.  탄성소재연구소 부지 제외시설 용역 완료

○ ‘27.    탄성소재연구소 부지 제외시설 착공

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-