8-5-1		사상역세권 개발(광장로 교각,경관조명)

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 ■ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	(부서) 도시관리과 (팀) 디자인광고팀	담당자	손창수 (☎4622)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 사업구간: 경전철 괘법르네시떼역 ~ 경부선 사상역(890m)

○ 사업기간: 2020. 4. ~ 2025. 2.

○ 사 업 비: 32억 원(1구간 20억원, 2구간 12억원) ‣ 시행사: SK건설

○ 사업내용: 부산·김해 경전철 교각 야간 경관조명 설치 등

□ 사업내용

○ 내    용: 경전철 교각 경관조명 점등 운영(1구간) ▷2구간: 사상역 문화숲 조성사업 연계 준공·운영

○ 운영기간: 2021. 1. ~ 계속

○ 운영구간: 경전철 괘법르네시떼역 ~ 사상역(717m)

○ 운영시간: 2월 ~ 5월(19시~23시)/ 6월 ~ 9월(20시∼23시)/ 10 월 ~ 1월(18시~23시)

○ 운영방법: 계절별 프로그램 변경(봄-분홍,여름-파랑,가을-갈색,겨울-빨강)

○ 운 영 사: ㈜스타라이팅

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022.7.	2023	2024	2025	2026.6.
경관조명 운영(1구간)
경관조명 및 입체영상 운영(2구간)

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	1,404	(2,000)	22	22	1,240	40	40	40
국 비
시 비
구 비	204		22	22	40	40	40	40
기 타	1,200	(2,000)			1,200

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
광장로 교각, 경관조명 설치 운영	• 전 구간(괘법르네시떼역~경부선사상역)경관조명 설치 운영

□ 현재까지 추진경과

○ 2019. 11.: 경관조명 설치 사업안 보고회 개최

○ 2020. 4. ~ 10.: 경관조명 공사

○ 2020. 10. ~ 12.: 사업자 시범운영(SK건설)

○ 2020. 12.: 기부금품 기부(SK건설 ⇒ 사상구, 1구간 20억 상당)

○ 2021. 1.~ : 경관조명 운영(1구간)

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022~2024년	• 경관조명 운영(1구간) -운영구간: 경전철 괘법르네시떼역~사상역(717m) -운영시간: 일몰전후~23시 -운영방법: 계절별 프로그램(조명색) 변경 ▷운영사: ㈜스타라이팅
2025년 1분기	• 경관조명 운영(1구간) - 운영구간: 경전철 괘법르네시떼역~사상역(717m) - 운영시간: 일몰전후~23시 - 운영방법: 계절별 프로그램(조명색) 변경 ▷운영사: ㈜스타라이팅

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 1구간 경관조명 지속 운영

○ 2구간 사업추진: 사상역 문화숲 조성사업 연계 준공

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

8-5-2		사상역세권 개발(사상역 문화숲 조성)

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 ■ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 ■이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	(부서) 녹지공원과 (팀) 녹지팀	담당자	조나정 (☎4532)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 괘법동 572-1번지 일원(사상역 공영주차장)

○ 면    적: A=13,000㎡

○ 기    간: 2020년 ~ 2025년

○ 사업내용: 광장형 도시숲 조성(수목식재, 편의시설 등)

○ 사 업 비: 3,800백만원(국 1,550, 시 1,550, 복구비 700백만원)

□ 사업내용

○  사상역 공영주차장 부지 내 주민친화 광장형 도시숲 조성(수목식재, 편의시설 등)

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026.6월
문화숲 조성

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	3,800				3,800
국 비	1,550				1,550
시 비	1,550				1,550
구 비
기 타	700				700

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
사상역 문화숲 조성사업	• 사상역 문화숲 예산확보 및 착공

□ 현재까지 추진경과

○ 2020. 02. 26.: 실시설계용역 착수 / ○ 2020. 04. 07.: 착수보고회 개최

○ 2021. 06. 18.: 2022년 산림청 예산신청 ▷ 미세먼지차단숲 18억원 확보

○ 2021. 12. 01.: 제9차 도시숲 심의위원회 심의 ▷ 조건부가결

○ 2021. 12. 13.: 실시설계용역 준공

○ 2022. 10. 12.: 국시비예산 13.5억 반납 ※ SK 씽크홀 복구지연에 따른 사업시행 어려움

○ 2023. 01.    : 2023년 도시바람길숲조성 균특예산 신청(25억원)

○ 2023. 02.    : 도시바람길숲사업 선정 및 설계비 市재배정(180백만원)

○ 2023. 04.    : 사상역 문화숲 조성사업 실시설계 보완용역 착수

○ 2023. 06.    : 실시설계 보완용역 착수보고회

○ 2023. 06. 21.: 보완설계 용역 중지(사유: 행정절차 이행 등)

○ 2023. 12.    : 보완 실시설계용역 완료

○ 2024. 01.~ 05.: 계약 심사 등 행정절차 이행

○ 2024. 07. 01.: 공사 착공

○ 2024. 07. 01. ~ 2025. 5. 30.: 공사 추진 중

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	10	20	30	30	40	50	55	60	★100	★100	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1분기	• 2024년 사상역 문화숲 조성 공사비(2,500백만원) 예산신청 • 2023. 3.: cy주차장 부지 민자개발사업 관련 사업추진 촉구
2023년 2분기	• 2023. 4. ~ 12.: 사상역 문화숲 조성 실시설계 보완용역
2023년 3분기
2023년 4분기
2024년 1분기	• 사상역 문화숲 조성 실시설계 보완용역 계약심사 및 관련기관 협의 등
2024년 2분기	• 사상역 문화숲 조성 사업 공사 계획수립 및 공사 발주
2024년 3분기	• 사상역 문화숲 조성 사업 공사 일시중지 및 해제※주차장 폐지관련 등 행정절차 이행 • 사상역 문화숲 조성 사업 공사 재개(바닥깨기 완료 등)
2024년 4분기	• 기반조성을 위한 토공 및 우수공, 경계석 등 시설물 설치
2025년 1분기	• 파고라, 데크 등시설물 설치 및 수목 식재

□ 문제점 및 대책

○ 대체 주차장 건축 지연으로 인한 사업 일정 지연(25년 상반기 준공 예정)

- 대체주차장 건축 및 주차장 폐지 절차 완료 후 문화숲 공사 시행 중

□ 향후 추진계획

○ 2025. 5.: 사상역 문화숲 조성 공사 준공(예정)

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	2	-

2023. 02.17.(국제신문)	2024.08.29.(연합뉴스)

○ 언론·방송보도