8-8		서부산 행정복합타운 조기 착공 추진

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 ■ 부산시 □ 부산시+사상구 □ 사상구 ■ 기타	예 산	□ 예산 ■ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	미래청년기획단 비전추진팀	담당자	서경수 (☎5232)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 학장동 230-1번지

○ 규    모: 대지 8,160.2㎡, 연면적 88,973㎡,  지하 5층/지상 14층, 31층(2개동)

○ 사업기간: 2017 ~ 2027

○ 사 업 비: 4,133억원(용지 366 건축 2,848, 기타 919)

○ 시 행 자: 부산광역시, 부산도시공사

○ 입주기관(17개)

▹부 산 시(6개): 도시균형재생국, 건설본부, 낙동강관리본부, 차량등록사업소, 데이터센터, 통합관제센터

▹공사공단(3개): 부산시설공단, 부산환경공단, 부산관광공사

▹출연기관(4개): 신용보증재단, 테크노파크, 경제진흥원, 부산연구원

▹수탁기관(4개): 장애인권익옹호기관, 부산시민운동지원센터, 부산광역시자원봉사센터, 여성

긴급전화 1366부산센터

□ 사업내용

○ 서부산권 균형발전을 위한 서부산행정복합타운 건립으로 행정수요에 능동적 대처 및 사상드림스마트시티 활성화 도모

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026.6월
설계 공모
건축 공사

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
서부산 행정복합타운 조기 착공	• 서부산 행정복합타운 착공

□ 현재까지 추진경과

○ '15.12.: 서부산청사 건립 결정

○ '17.12.: 기본계획 및 타당성용역 준공

○ ‘18.12. : 활성화구역 지정 고시

○ ‘19. 1. ~ 12. : 활성화구역 부지보상 완료

○ ‘20. 4.: 공장 시설물 이전 완료

○ ‘22.12.: 용지조성 준공, 공공건축심의 완료

○ ‘23. 4.: 중앙투자심사 완료, 설계공모 공고

○ ‘23. 8.: 설계공모 선정, 설계착수

○ ‘24. 7.: 건축허가 완료

○ ‘24. 11.: 실시설계 VE, 설계심의

○ ‘25. 2.: 설계 용역 준공

○ ‘25. 3.: 공사 및 감리 입찰 공고 및 사전심사

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	5	8	15	18	20	50	60	70	75	85	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 용지조성 준공, 공공건축심의 완료
2023년 1분기	• 중앙투자심사 완료
2023년 2분기	• 설계공모 공고
2023년 3분기	• 설계공모 당선작 선정, 실시설계 착수
2023년 4분기	• 실시설계 용역 중, 서부산행정복합타운 착수식 개최(11.6.)
2024년 1분기	• 실시설계 용역 중
2024년 2분기	• 실시설계 용역 중, 건축위원회 심의 통과
2024년 3분기	• 건축허가 완료
2024년 4분기	• 실시설계 VE, 설계심의
2025년 1분기	• 설계 준공, 공사 및 감리 입찰

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

○  2025. 4.          공사 적격자 선정

○  2025. 7. ~ 2027.  공사 시행

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	3	-

○ 언론/방송 보도

2024. 4. 8.(NEW1)	2024. 8. 5.(국제신문)
2024. 8. 5.(부산일보)