10-2		구덕터널~꽃마을 연결 도로 개설

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	건설과 도시계획팀	담당자	이진우 (☎4712)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 사상구 학장동 산62-8번지 ~ 서구 꽃마을 경계

○ 사업규모: 도로개설(확장) L=874.9m, B=8~14.4m

○ 사 업 비: 7,370백만원(공사 4,670, 보상2,600, 기타100)

○ 사업기간: 2020 ~ 2025

□ 사업내용

□ 추진경과

○ 2020. 3. ~ 2022. 6.: 도시관리계획(도로) 결정 및 실시설계 용역

○ 2020. 12.: 도시관리계획(도로) 결정(신설) 및 지형도면 고시

○ 2022. 06.: 1차 공사 착공(L=543.4m, B=8~9m)

○ 2023. 12.: 1차 공사 준공

○ 2024. 04.: 2차 공사 착공(L=331.5m, B=8~14.4m)

□ 향후계획

○ 2025. 04.: 2차공사 준공(L=331.5m, B=8~14.4m)

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내									임기 후
	2022			2023		2024	2025		2026.6.
1차구간 보상 및 공사 추진 (L=543.4m, B=8~9m)
2차구간 보상 및 공사 추진 (L=331,5m, B=8~14.4m)

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	7,370	2,890	1,400	1,300	1,780
국 비
시 비	50	50
구 비	4,920	1,040	1,400	700	1,780
기 타	2,400	1,800		600

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
구덕터널 상부~서구경계간 도로개설공사(1,2차)	• 구덕터널 상부~서구경계간 도로개설공사(1차) 준공 • 구덕터널 상부~서구경계간 도로개설공사(2차) 준공	1차공사 준공

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	20	20	30	40	50	50	55	60	80	90	-	-	-

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1분기	• 2023.01. : 1차구간 공사 일시정지 해제
2023년 2분기	• 2023.06. : 1차구간 공사 추진중(공정률 약 55%)
2023년 3분기	• 2023.09. : 1차구간 공사 추진중(공정률 약 80%)
2023년 4분기	• 2023.12. : 1차구간 공사 준공
2024년 1분기	• 해당없음
2024년 2분기	• 2024.4. : 2차구간 공사 착공
2024년 3분기	• 2024.9. : 2차구간 공사 추진중(공정률 약 40%)
2024년 4분기	• 2024.12. : 2차구간 공사 추진중(공정률 약 60%)
2025년 1분기	• 2025.3. : 2차구간 공사 추진중(공정률 약 80%)

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 2025.6. : 2차공사 준공 예정

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-