10-3		관문대로 방음벽 설치․교체

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 ■ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	건설과 토목1팀	담당자	명세현 (☎4694)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치 : 모라동 백양터널 앞 모라고가교(모라주공APT~삼락IC)

○ 사업개요 : 방음벽 정비(양측) L=1,334m, H=3m

○ 사업기간 : 2023 ~ 2026

○ 사 업 비 : 1,550백만원(공사 1,400, 설계 150)

□ 사업내용

○ 모라동 관문대로(모라고가교) 일원 노후 방음벽 재정비를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 주민생활불편 최소화

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내														임기 후
	2022	2023			2024			2025			2026.6.
1단계 정비
2단계 정비

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	1,550		650		900
국 비
시 비	650		650
구 비
기 타	900				900

Ⅱ. 추진실적

□ 공약이행확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
관문대로 방음벽 설치·교체	• 관문대로 방음벽 설치·교체 완료

□ 현재까지 추진경과

○ 2022.12. 市 재배정 예산 확보(650백만원)

○ 2023. 1. 실시설계용역 착수

○ 2023. 4. 소음영향분석 및 저감방안 수립 용역 착수 및 완료

○ 2023.12. 실시설계용역 완료, 1단계 공사(L=584m) 착공

○ 2024. 2. 도로점용공사장 교통소통대책 심의(부산시)

○ 2024. 5. 1단계 공사(L=584m) 준공

○ 2024.12. 특별조정교부금 확보(900백만원)

○ 2025. 4. ~ 9. 실시설계용역(2단계) 착수 및 완료

○ 2025. 5. ~ 7. 소음영향분석 및 저감방안 수립 용역 착수 및 완료

○ 2025. 7. 도로점용공사장 교통소통대책 심의(부산시)

○ 2025.11. 2단계 공사(L=740m) 착공

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	5	10	12	12	15	17	50	55	60	65	70	72	75

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1분기	• 2023. 1.: 실시설계용역 착수
2023년 2분기	• 2023. 4. ~ 5.: 소음영향분석 및 저감방안 수립 용역 시행
2023년 3분기	• 방음벽 설치 위치 및 방안 검토
2023년 4분기	• 2023. 11.: 공사 착공
2024년 1분기	• 2024. 2.: 교통영향평가심의 및 방음판 철거
2024년 2분기	• 2024. 5.: 공사 준공
2024년 3분기	• 2024. 6.~8.: 예산확보 건의 및 협의(→市 도로계획과)
2024년 4분기	• 2024. 12.: 특별교부금(900백만원) 교부
2025년 1분기	• 2025. 3.: 실시설계용역(2단계) 발주
2025년 2분기	• 2025. 4.: 실시설계용역 착수 • 2025. 5. ~ 7.: 소음영향분석 및 저감방안 수립 용역 시행
2025년 3분기	• 2025. 7.: 교통영향평가심의
2025년 4분기	• 2025. 9.: 실시설계용역 완료 및 2단계 공사(L=740m) 발주

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 2026. 2.: 공사 준공

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-