10-4		신모라사거리 회전육교 설치

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	■ 완료 □ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	건설과 토목1팀	담당자	신지현 (☎4692)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 모라동 1370-1 일원(신모라 사거리 일원)

○ 규    모: 보행육교 연결 N=2개소(L=120m, B=3m)

○ 사 업 비: 3,200백만원(공사 3,000, 설계 100, 기타 100)

□ 사업내용

○ 모라동 신모라사거리 일원은 다수의 주민들이 보행하는 구간으로 보행 연속성 확보 및 안전한 보행환경 조성을 위해 육교 간 연결공사 추진

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내									임기 후
	2022.7.	2023		2024		2025			2026.6.
실시설계 용역 시행
공사 시행

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	3,200		1,900	800	500
국 비
시 비
구 비	500				500
기 타	2,700		1,900	800

Ⅱ. 추진실적

□ 공약이행확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
모라동 신모라사거리 회전육교 설치사업	• 신모라사거리 회전육교 설치사업 준공

□ 현재까지 추진경과

○ 2022.12.: 특별조정교부금 확보(1,900백만원)

○ 2023. 3.: 실시설계용역 착수

○ 2023.12.: 실시설계용역 완료, 특별교부세 확보(800백만원)

○ 2024. 1.: 공사 착공

○ 2024. 5.: 계단철거 및 현장타설말뚝 시공

○ 2024. 6.: 교량 기초 변경설계

○ 2024. 7.: 설계안전성검토 완료

○ 2025.10.: 공사 준공

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	2	10	20	40	45	50	55	60	65	70	85	95	100

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1분기	• 2023. 3.: 기본 및 실시설계용역, 경관디자인 수립용역 착수
2023년 2분기	• 각종 지장물건 조사 • 이설 비용 및 가능 여부 확인 • 사업시행을 위한 백양대로 교통체계 개선 협의
2023년 3분기	• 지반조사 및 인접 구조물 영향성 검토, 유관기관 협의
2023년 4분기	• 공법선정위원회 개최 및 공법 선정 • 신기술(특허)사용 협약 체결 및 설계 반영
2024년 1분기	• 공사 발주 • 교통소통대책 심의 • 안전관리계획서 작성 및 검토
2024년 2분기	• 공사 추진
2024년 3분기	• 공사 추진
2024년 4분기	• 공사 추진
2025년 1분기	• 공사 추진
2025년 2분기	• 공사 추진
2025년 3분기	• 공사 추진
2025년 4분기	• 공사 준공, 사업완료

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 해당없음

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	-	1	3	-

○ 설명회/설문조사/전문가 자문/언론보도

구 분	내 용	관련사진
기술자문	○ 일 시: 2025. 4. 14.(월) ○ 자문내용: 육교 교각 편기 관련 교각철근 재시공 및 보강 등에 대한 안정성 및 적정성 검토 ○ 참 여 자: 기술자문위원 2명
준공식	○ 일 시: 2025. 10. 29.(화) 17:00~ ○ 장 소: 사상구 모라동 505-1번지 일원 ○ 참 석: 약 200여명 ► 구청장, 시·구의원, 단체장, 지역주민 등
언론보도	○ 국제뉴스(2025.10.30.) ○ 국제신문(2025.10.30.) ○ 부산일보(2025.10.30.)