10-7		사상~하단간 도시철도 조기 완공 추진

사업기간	□ 임기내 ■ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	■ 국가 ■ 부산시 □ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	□ 예산 ■ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	교통행정과 교통행정팀	담당자	이수영 (☎4552)

Ⅰ. 공약실천계획

□ 사업개요

○ 사업구간: 사상역(2호선) ~ 새벽시장 ~ 엄궁 ~ 낙동대로 ~ 하단역(1호선)

○ 사업규모: 총연장 6.9㎞, 정거장 7개소, 차량기지 1개소

▸ 정거장 7개소(사상, 새벽시장, 스마트시티, 학장천, 엄궁, 동아대, 하단)

○ 사업기간: 2010년 ~ 2027년

○ 총사업비: 8,336억 원(국 4,598 시 3,738)

□ 구간별 현황

구간별	공사구간	공사개요	착공	토목공정율	시공사
1공구	사상역(2호선)~민창철강	1,495m/정거장2	’15.12.	70%	SK건설
2공구	민창철강~캐스텍코리아	1,302m/정거장2	’17.05.	75%	두산건설
3공구	캐스텍코리아~법무보호복지공단 (지하화 결정▹14. 10. 10.)	2,312m/정거장1	’16.07.	85%	한진중공업
4공구	법무보호복지공단~호서부산빌딩	778.7m/차량기지1	’17.05.		대림건설
5공구	호서부산빌당~하단역(1호선)	1,034m/정거장2	’15.12.		한화건설

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내													임기 후
	2022		2023			2024				2025		2026.6월
공사 시행

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
사상~하단간 도시철도 건설	• 계획수립 → 설계용역 착수 및 완료 → 공사 착공 → 공사 준공

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1~4분기	• 구조물 공사, 가시설 흙막이 공사, 새벽로 정거장 복공작업, 토공 가시설 작업
2024년 1분기	• 구조물 공사, 가시설 흙막이 공사, 새벽로 정거장 복공작업, 토공 가시설 작업
2024년 2분기	• 구조물 공사, 가시설 흙막이 공사, 새벽로 정거장 복공작업, 토공 가시설 작업
2024년 3분기	• 구조물 공사, 가시설 흙막이 공사, 새벽로 정거장 복공작업, 토공 가시설 작업
2024년 4분기	• 구조물 공사, 가시설 흙막이 공사, 새벽로 정거장 복공작업, 토공 가시설 작업
2025년 1분기	• 구조물 공사, 가시설 흙막이 공사, 새벽로 정거장 복공작업, 토공 가시설 작업
2025년 2분기	• 구조물 공사, 가시설 흙막이 공사, 새벽로 정거장 복공작업, 토공 가시설 작업
2025년 3분기	• 구조물 공사, 가시설 흙막이 공사, 새벽로 정거장 복공작업, 토공 가시설 작업

□ 문제점 및 대책

○ 공사기간 연장에 따른 주민 불편 및 공사구간 지반약화로 싱크홀 등 발생에 따른 대책 강구 필요

□ 향후 추진계획

○ 2027. 12. 공사 준공(예정)

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

□ 노선도