4-3		어르신 여가활동, 건강증진 종합타운 건립

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 ■ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	■ 완료 □ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	노인장애인복지과 노인복지팀	담당자	정소희 (☎4358)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 사상구 괘법동 산1-24번지 신라대학교 예음관 3층

○ 규    모: 연면적 505.91㎡

○ 총사업비: 748백만 원(특교금 80, 시비 476, 지방비 192)

- 건축비 648백만 원

- 물품구입비 100백만 원(자산취득비 등)

□ 사업내용

○ 초고령사회 대비 지역 내 대학 공간을 활용한 액티브 시니어의 자발적 커뮤니티 육성

- 전유공간: 예음관 중 일부 상담실, 동아리실, 미디어실 등

- 공유공간: 강의실, 실습실, 카페 등

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022	2023	2024	2025	2026.6월
건립 기본 계획 수립, 부지 검토
투자심사 등 사전절차 이행, 설계 실시
공사 착공 및 준공

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	748				748
국 비
시 비	476				476
구 비	192				192
기 타	80				80

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
건강증진종합타운 건립	• 엑티브 시니어를 위한 HAHA센터 조성

□ 현재까지 추진경과

○ ‘22. 8. 11. ~ 08. 12. : 우수지역 벤치마킹 실시(광주)

○ ‘22. 9.  2. : 우수지역 벤치마킹 실시(서울, 인천)

○ ‘23. 4. 12. : HAHA센터 생활권별 조성 시범사업 공모(1차)

○ ‘23. 4. 17. : 민선8기 공약사항4-③(건강증진종합타운 건립) 세부실천 계획 변경

○ ‘23. 4. 27. : 시범사업 신청서 및 사업계획서 제출 ▹엄궁동 구유지

○ ’23. 7. 20. : HAHA센터 생활권별 조성 시범사업 공모(2차)

○ ’23. 8.  7. : 시범사업 신청서 및 사업계획서 제출 ▹신라대 예음관 3층

○ ’23. 8. 17. : HAHA센터 시범사업 공모(2차) 선정

○ ’23. 9.  6. : HAHA센터 선정에 따른 대상지 구청장 현장방문

○ ’23. 12. 7. : HAHA센터 조성을 위한 사상구-신라대학교 서면 협약 체결

○ ’23. 12. 26. : HAHA센터 조성 공사 기본 및 실시설계용역 착수

○ ’24. 1.  5. : HAHA센터 조성 공사 기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최

○ ’24.  1. ~ 3. : HAHA센터 조성 공사 기본 및 실시설계관련 市 자문 회의

○ ’24.  5. 20. : HAHA센터 조성 공사 기본 및 실시설계용역 완료

○ ’24.  7.  1. : HAHA센터 조성 공사 및 용역 발주(안) 계획 수립

○ ’24.  8. 21. : HAHA센터 착공 및 용역 착수

○ ’24. 11.  8. : HAHA센터 착공 및 용역 완료

○ ’24. 11.~12. : HAHA센터 조성을 위한 사인물 설치, 가구 및 물품 구입 등

○ ’24. 12. 31. : HAHA센터 조성

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	2022.4분기	2023.1분기	2023.2분기	2023.3분기	2023.4분기	2024.1분기	2024.2분기	2024.3분기	2024.4분기
추진율(%)	5	7	10	12	13	15	65	85	★100

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 구청장 공약사항 실천을 위한 우수지역 벤치마킹 실시(광주, 서울, 인천)
2023년 1분기	• 신노년복합문화공간(HA-HA센터)조성을 위한 사업대상지 선정
2023년 2분기	• 신노년복합문화공간(HA-HA센터)조성을 위한 시 공모사업 신청서 및 사업계획서 제출
2023년 3분기	• 2023. 8.: HAHA센터 생활권별 시범사업 조성 공모 신청 및 선정 • 2023. 9.: HAHA센터 건립 기본계획 수립
2023년 4분기	• 2023. 12.: HAHA센터 조성 공사 기본 및 실시설계용역 착수
2024년 1분기	• 2024. 1.: HAHA센터 조성 공사 기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최 • 2024. 3.: 설계 관련 市 자문 회의
2024년 2분기	• 2024. 4.: HAHA센터 조성 공사 기본 및 실시설계용역 최종 보고회 개최 • 2024. 5.: HAHA센터 조성 공사 기본 및 실시설계용역 완료 • 2024. 6.: HAHA센터 조성 공사 발주
2024년 3분기	• 2024. 7.: HAHA센터 조성 공사 및 용역 발주 • 2024. 8.: HAHA센터 조성 공사 및 용역 착수
2024년 4분기	• 2024. 11.: HAHA센터 조성 공사 및 용역 완료 • 2024. 11.: HAHA센터 조성을 위한 가구 및 물품 등 구입 • 2024. 12.: HAHA센터 조성

□ 문제점 및 대책

○ (문제점) 하하센터 조성 후 운영에 관한 구체적인 매뉴얼 부재

○ (대  책) 대학 내 평생교육원과의 협업을 통해 시설 운영 효율화 방안 모색

□ 향후 추진계획

○  2025.  1.         HAHA센터 시범운영

○  2025.  3.         HAHA센터 개소식

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	2

○ 설계용역 보고회

구 분	내 용	관련사진
설계용역 보고회	○ 일 시: 2024. 4. 12.(금) 14:00 ○ 장 소: 신라대학교 예음관 126호 ○ 대 상: 구청장, 구의원, 신라대학교 관계자, 관계 공무원 ○ 내 용: 설계용역 최종안 보고, 질의응답 및 의견수렵

○ 구청장 현장방문

8월 30일 (HAHA센터 현장)	8월 30일 (HAHA센터 현장)	8월 30일 (HAHA센터 현장)