4-4		어르신이 편리한 보행환경 조성

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	■ 완료 □ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	건설과 토목 1・2팀	담당자	김성훈 (☎4702) 최윤진 (☎4696) 이찬희 (☎4695)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 주례지하철역 왕굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치

- 사업비: 1,300백만 원(공사 1,250, 설계 40, 기타 10)

- 사업규모: 엘리베이터 설치 1개소

- 사업기간: 2021. 8. ~ 2024. 7.

○ 모라동 동원 아파트 앞 육교 교통약자 편의시설 설치

- 사업비: 900백만 원(공사 880, 설계 20)

- 사업규모: 엘리베이터 설치 2개소

- 사업기간: 2022. 6. ~ 2024. 8.

○ 덕포동 덕개굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치

- 사업비: 700백만 원(공사 680, 설계 20)

- 사업규모: 엘리베이터 설치 1개소

- 사업기간: 2022. 6. ~ 2024. 8.

□ 사업내용

○ 2024. 03.: 엘리베이터 설치 완료 및 공사 준공(주례지하철역 왕굴다리 일원)

○ 2024. 03.: 엘리베이터 골조 설치(모라동 동원아파트 앞 육교)

○ 2024. 01.: 엘리베이터 골조 설치(덕포동 덕개굴다리 일원)

□ 연차별 추진계획 - 확인필요

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내														임기 후
	2022.7.	2023						2024					2025	2026.6.
주례지하철역 왕굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치
모라동 동원 아파트 앞 육교 교통약자 편의시설 설치
덕포동 덕개굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	2,900	800	2,100
국 비
시 비
구 비	1,000		1,000
기 타	1,900	800	1,100

※ 주례지하철역 왕굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치 (특교세800, 구비500)

※ 모라동 동원 아파트 앞 육교 교통약자 편의시설 설치 (특교세700, 구비200)

※ 덕포동 덕개굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치 (특교세400, 구비300)

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
주례지하철역 왕굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치	•주례지하철역 왕굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치공사 준공
모라동 동원 아파트 앞 육교 교통약자 편의시설 설치	•모라동 동원 아파트 앞 육교 교통약자 편의시설 설치공사 준공
덕포동 덕개굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치	•덕포동 덕개굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치공사 준공

□ 현재까지 추진경과

○ 주례지하철역 왕굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치

- 2023. 02.: 공사 착공

- 2024. 03.: 엘리베이터 개통 및 사업 준공

○ 모라동 동원아파트 앞 육교 교통약자 편의시설 설치공사

- 2023. 06.: 공사 착공

- 2024. 06.: 엘리베이터 개통 및 사업 준공

○ 덕포동 덕개굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치

- 2023. 06.: 공사 착공

- 2024. 06.: 엘리베이터 개통 및 사업 준공

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	2022.4분기	2023.1분기	2023.2분기	2023.3분기	2023.4분기	2024.1분기	2024.2분기
추진율(%)	10	12	25	50	70	75	100

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1분기	• 2023. 2.: 교통약자 편의시설 설치공사 착공(주례지하철역 왕굴다리 일원 ) 국가철도공단 협의 완료(덕포동 덕개굴다리 일원) • 2023. 4.: 관급자재(다수공급자 2단계) 업체선정(모라동 동원아파트 앞 육교)
2023년 2분기	• 2023. 6.: 교통약자 편의시설 설치공사 착공 (모라동 동원아파트 앞 육교, 덕포동 덕개굴다리 일원) 지장물 관련 구조검토 완료 후 공사 재개(주례지하철역 왕굴다리 일원)
2023년 3분기	• 2023. 9.: 엘리베이터 골조 설치 완료(주례지하철역 왕굴다리 일원) • 2023. 9.: 지장물 이설 협의 진행(모라동 동원아파트 앞 육교) • 2023. 9.: 엘리베이터 설치구간 터파기 및 기초설치 완료(덕포동 덕개굴다리 일원)
2023년 4분기	• 2023. 11.: 엘리베이터 현장 설치 중(주례지하철역 왕굴다리 일원) • 2023. 11.: 지장물 이설 완료 후 공사 재개(모라동 동원아파트 앞 육교) • 2023. 11.: 엘리베이터 현장 설치 및 덕개굴다리 바닥 깨기 철도공단과 협의 중 (덕포동 덕개굴다리 일원)
2024년 1분기	• 2024. 03.: 엘리베이터 설치 완료 및 공사 준공(주례지하철역 왕굴다리 일원) • 2024. 03.: 엘리베이터 골조 설치(모라동 동원아파트 앞 육교) • 2024. 01.: 엘리베이터 골조 설치(덕포동 덕개굴다리 일원)
2024년 2분기	• 2024. 06.: 엘리베이터 설치 완료 및 공사 준공(모라동 동원아파트 앞 육교) • 2024. 06.: 엘리베이터 설치 완료 및 공사 준공(덕포동 덕개굴다리 일원)

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

○ 해당사항 없음

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	-	-	-	-

○ 주민설명회 개최(주례지하철역 왕굴다리 일원 교통약자 편의시설 설치공사)

구 분	내 용	관련사진
주민설명회	○ 일 시: 2023. 1. 11. (수) 16:00 ○ 장 소: 주례1동 행정복지센터 4층 대회의실 ○ 대 상: 지역주민 및 이해당사자, 구의원 등 ○ 내 용: 사업설명 및 시행 안내 * 주민의견 중 사업시행과 관련하여 타당한 의견은 적극 검토 예정