4-5		경로당 확충(주례권역, 학장·엄궁권역)

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 ■ 부산시+사상구 □ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	■ 완료 □ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	노인장애인복지과 노인복지팀	담당자	권성진 (☎4325)

Ⅰ. 공약실천계획

□ 사업개요

○ 추진시기: 2022년 7월 ~ 완료 시

○ 위    치: 진사로36번길 43-1, 엄궁동 510-15 일원

○ 추진내용: 경로당이 없거나 교통이 불편하여 이용하기가 어려운 지역에 경로당을 설치

○ 추진방법: 기존 주택 및 부지 매입 등을 통한 경로당 설치

○ 소요예산: 사업비 6억 원(부지매입비 2.8억 원, 건축비 등 3.2억 원)

□ 사업내용

○ 경로당이 없거나 교통이 불편하여 이용하기가 어려운 지역에 경로당을 설치

- 주례2권역: 기존주택 매입 및 리모델링을 통한 경로당 설치

- 엄궁‧학장권역: 구유지 활용하여 경로당 신축

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내									임기 후
	2022			2023			2024	2025	2026.6월
(주례2)예산 확보, 건립 기본계획 수립, 부지 검토
(주례2)공사 착공 및 준공
(학장‧엄궁)예산 확보, 건립 기본계획 수립, 부지 검토
(학장‧엄궁)공사 착공 및 준공

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	600		281	319
국 비
시 비	300			300
구 비	300		281	19
기 타

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
경로당 확충	•주례권역, 학장･엄궁권역 경로당 건립

□ 현재까지 추진경과

○ 2022.  8. : 「엄궁동 경로당 건립」 시비 편성 요구

○ 2022. 10. : 「주례2권역 경로당」 감정평가

○ 2022. 11. : 「주례2권역 경로당」 공유재산심의회 심의 결정

○ 2022. 12. : 「엄궁동 경로당 건립」 시비 편성 확정

○ 2022. 12. : 「주례2권역 경로당」 매입

○ 2023.  2. : 「주례2권역 경로당」 리모델링 추진

○ 2023.  4. : 「진사경로당」 개소식

○ 2023.  4. : 「엄궁동경로당 건립」 공유재산심의회 심의 결정

○ 2023.  8. : 「엄궁동경로당 건립」 기본계획(안) 수립

○ 2023. 11. : 「엄궁동경로당 건립」 설계용역 계약

○ 2023. 12. : 「엄궁동경로당 건립」 BF예비인증 용역

○ 2024.  1. : 「엄궁동경로당 건립」 지적측량(경계복원) 실시

○ 2024.  3. : 「엄궁동경로당 건립」 공사비 증액 방침 결정(300백만원 → 361백만원)

○ 2024.  5. : 「엄궁동경로당 건립」 공사비 증액 추경(300백만원 → 410백만원)

○ 2024.  6. : 「엄궁동경로당 건립」 설계용역 완료

○ 2024.  7. : 「엄궁동경로당 건립」 착공

○ 2024.  9. : 「엄궁동경로당 건립 선금지급(토목,기계)

○ 2024. 10. : 「엄궁동 경로당 건립」 관급자재 구매(냉난방기)

○ 2024. 12. : 「엄궁동 경로당」 운영물품(전자제품,가구) 조달 구매

○ 2025.  3. : 「엄궁본동경로당 건립」 개소식

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	2023.1분기	2023.2분기	2023.3분기	2023.4분기	2024.1분기	2024.2분기	2024.3분기	2024.4분기	2025.1분기
추진율(%)	50	50	52	60	65	70	75	80	★100

○ 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 주례2권역 경로당를 위한 감정평가 및 주택 매매계약 실시
2023년 1분기	• 주례2권역 리모델링 실시
2023년 2분기	• 주례2권역(진사경로당) 개소식
2023년 3분기	• 2023. 8.: 엄궁권역 경로당 건립 정책회의 개최 • 2023. 9.: 엄궁권역 경로당 건립 기본계획 수립
2023년 4분기	• 2023. 10.: 엄궁동 경로당 설계용역
2024년 1분기	• 2024. 3.: 엄궁동 경로당 건립 공사비 증액 방침결정(300백만원→361백만원)
2024년 2분기	• 엄궁동 경로당 공용건축물 승인, BF예비인증 용역 완료, 실시설계 완료
2024년 3분기	• 설계용역 완료, 공사 착공
2024년 4분기	• 경로당 운영을 위한 물품 구매 등
2025년 1분기	• 엄궁본동 경로당 완공 및 개소식

□ 문제점 및 대책

○ (문제점) 초고령사회로 진입하고 있는 등 노년 인구 급증으로 노인 여가시설 확충과 더불어

경로당의 폐쇄성, 단순 쉼터 역할에서 벗어나 개방적이고 활동적인 공간으로의

탈바꿈 필요

○ (대  책) 경로당 확충과 더불어 경로당 운영 방법 개선 등 점진적인 경로당 역할 변화, 활성화 적극 추진

□ 향후 추진계획

○ 해당사항 없음

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	4	-

○ 언론/방송 보도

2023. 5. 4. (뉴스투나잇)	2023. 5. 9. (부산일보)
2025. 4. 1. (부산일보)	2025. 4. 1. (미디어투데이)

○ 구청장 현장방문

2023. 5. 2. (진사경로당)	2023. 5. 2. (진사경로당)
2025. 3. 28.(엄궁본동경로당)	2025. 3. 28.(엄궁본동경로당)