5-4		백양산 무장애 숲길 조성

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	■ 신규 □ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 ■ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	녹지공원과 경관생태팀	담당자	김의진 (☎5144)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 위    치: 모라동 산33번지 일원(서당골공원 ~ 모라산림공원) ※ 산림청 국유지

○ 기    간: 2024년 ~ 2026년

○ 소요예산: 5억원(시·구비)

○ 사업내용: 보행약자를 위한 데크로드 및 야자매트 설치, 쉼터 조성 등

□ 사업내용

○ 장애인, 어린이, 노인, 임산부 등 교통 약자층을 위한 무장애숲길 조성으로 접근성 개선 및 산림복지 불평등 해소

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내							임기 후
	2022	2023	2024		2025		2026.6월
공모사업 신청
실시설계 용역
공사추진

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	500	-	-	-	-	112	388	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	425	-	-	-	-	95	330	-
구 비	75	-	-	-	-	17	58	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ. 추진실적

□ 공약이행확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
백양산 무장애숲길 조성	• 백양산 무장애숲길 조성사업 예산확보 및 공사시행

□ 현재까지 추진경과

○ `24.  7.: 대상지 선정 및 공모추진 계획 수립

○ `24.  7.: 공모사업 신청 [區→市(푸른숲도시과)→한국산림복지진흥원]

○ `24.  8.: 현장심사

○ `24. 10.: 공모사업 미선정 (주차장 등 기반시설 미비)

○ `25.  1.: 숲길조성관리(등산로) 예산확보

○ `25.  6.: 실시설계 완료

○ `25.  9.: 공사 계약 및 발주

○ `25. 12.: 무장애 숲길 조성 완료

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	-	-	-	10	15	15	20	25	30	30	40	70	100

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2024년 3분기	• 대상지 선정 및 계획수립, 공모신청, 현장심사
2024년 4분기	• 숲길조성관리(등산로) 예산 확보
2025년 1분기	• 대상지 현장조사
2025년 2분기	• 실시설계 완료
2025년 3분기	• 공사 계약 및 발주
2025년 4분기	• 무장애 숲길 조성 완료

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 추진계획

○ `26. 1.~6.: 2차 구간 사업 시행

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	1	-

○ 언론/방송 보도

`24.7.12.(부산일보)