5-6		사상근린공원 조성 조기 완료

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 ■ 부산시 □ 부산시+사상구 □ 사상구 ■ 기타	예 산	□ 예산 ■ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	녹지공원과 경관생태팀	담당자	김의진 (☎5144)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요

○ 사업기간: 2017년 ~ 2026년

○ 사업면적: A=623,118㎡(공원시설: 573,281㎡, 비공원시설 49,837㎡)

○ 시 행 자: 부산광역시장, ㈜사상파크홀딩스 ☞ 공동시행

○ 사 업 비: 3,371.8억원(공원 626.8억, 비공원시설 2,745억) - 민간자본

공원명	공원 면적 (㎡)	사업규모(㎡)			사업비(억원)
		계	공 원	비공원	계	공 원				비공원
						소계	보상	공사	기타	소계	보상	공사	기타
사상공원	623,118	623,118 (100%)	573,281 (92%)	49,837 (8%)	3,371.8	626.8	203.7	305	118.1	2,745	64	1,837	844

※ 비공원시설(제2종주거) : 세대수 ☞ 852세대, 높이 ☞ 해발 157.2m, 규모 ☞ 지하3층/지상25층

□ 사업내용

○ 운산커뮤니티센터, 다목적시민주차장, 천개의정원, 반려동물 놀이터 및 산책로 등 사상근린공원 조성 완료

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내					임기 후
	2022.7.	2023	2024	2025	2026.6.
도시계획절차 이행
공원시설 착공

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	3,371,800						3,371,800
국 비
시 비
구 비
기 타	3,371,800						3,371,800

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
사상공원 민간공원조성 특례사업	• 사상근린공원 공원시설 착공

□ 현재까지 추진경과

○ 2019. 5. ~ 7.: 3순위자 협상(사상파크홀딩스), 도시공원·도시계획위원회 자문

○ 2020. 3.: 공원조성계획변경결정 및 지형도면 고시

○ 2020. ~ 2021.: 보상계획 열람공고, 수용재결 및 보상완료

○ 2022. 5.: 비공원시설 주택건설사업계획 승인

○ 2023. 2.: 민간공원 특례사업 설계보완 및 특화설계 완료, 부서의견협의

○ 2023. 6. 8.: 도시공원위원회 심의 원안 조건부 가결

○ 2023. 7.12.: 공원조성계획(변경)결정 및 지형도면 고시

○ 2024.   6.: 비공원시설(아파트) 공사 착공

○ 2025.  12.: 도시계획시설 실시계획 변경인가 절차 이행

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	-	-	5	10	15	30	50	50	55	55	55	60	80

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2023년 1분기	• 2023. 2.: 특화설계 회의 개최 • 2023. 3.: 특화설계 진행 및 공원조성계획 변경 진행	22.5. 비공원시설 주택건설사업 계획승인
2023년 2분기	• 2023. 4.: 공원조성계획(변경)결정 열람 공고 및 부서의견협의 진행 • 2023. 6.: 도시공원위원회 상정 및 공원조성계획 변경 고시 절차 진행
2023년 3분기	• 2023. 7.: 공원조성계획(변경)결정 및 지형도면 고시
2023년 4분기	• 2023.11.: 추가지반조사(4공) 및 실시계획인가 절차 진행
2024년 1분기	• 2024. 3.: 도시계획 절차 등 행정절차 진행
2024년 2분기	• 2024. 6.: 각종 인허가 절차 진행 중
2024년 3분기	• 2024. 9.: 설계보완 및 특화 진행, 설계VE 및 건설기술심의 진행
2024년 4분기	• 2024. 12.: 각종 영향평가 변경협의 완료 및 실시계획(변경)인가 추진
2025년 1분기	• 2025. 3. 세부설계(안) 조정 및 인허가 절차 수행
2025년 2분기	• 2025. 6. 실시계획인가(변경) 등 행정절차 이행 등
2025년 3분기	• 2025. 9. 실시계획인가 서류 검토 및 조정 등
2025년 4분기	• 2025. 9. 도시계획시설 실시계획 변경인가 절차 이행

□ 향후 추진계획

○ ‘26. 6.: 공원시설 공사 조기 착공

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-