5-7		생활 체육공원 조성

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	■ 완료 □ 이행 후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	정재환 (☎4912)

Ⅰ. 공약 실천계획

□ 사업개요 및 내용

○ 위    치: 덕포동 784번지(옛 덕포양묘장, 시유지)

○ 면    적: 800㎡

○ 조성시설: 체육시설(배드민턴장) 및 주민 쉼터 공간 조성

○ 소요예산: 500백만 원(운동시설 300, 체육공원 조성 200)

○ 부산시의 15분 생활권 정책사업으로 시비 확보 완료

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내							임기 후
	2022.7	2023		2024		2025	2026.6.
사업부지 협의
실시설계
공사

□ 연차별 소요예산액

(단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	500			500
국 비
시 비	500			500
구 비
기 타

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
공공용지 활용 생활체육시설 확충	• 생활 체육공원 조성 완료

□ 현재까지 추진경과

○ 2022.  8. 공공용지 활용 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정

○ 2023.  4. 체육시설 종목 변경 (풋살장 -> 배드민턴장)

○ 2023.  5. 실시설계 용역

○ 2023.  7. 관계자 협의

○ 2023. 10. 공사 계약심사

○ 2023. 12. 공사 착공

○ 2024.  2. 동절기 공정 하자 예방을 위한 일시정지

○ 2024.  5. 공사 준공

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	2022.4분기.	2023.1분기	2023.2분기	2023.3분기	2023.4분기	2024.1분기	2024.2분기
추진율(%)	5	5	10	25	40	80	100

○ 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• 시 15분 생활권 조성 및 권역별 체육시설 조성 공모사업 선정
2023년 1분기	• 사업계획부지(덕포동 784) 측량 및 타당성 여부 조사
2023년 2분기	• 사업계획 변경 - 당초: 풋살장 / 변경: 오픈형 배드민턴장 및 조깅트랙
2023년 3분기	• 실시설계 용역 착수(토목, 전기, cctv)
2023년 4분기	• 설계심사 및 공사 발주
2024년 1분기	• 공사 일시정지 (동절기 공정 하자 예방)
2024년 2분기	• 공사 준공

□ 문제점 및 대책

○ 사업대상지가 시유지로 공유재산 사용료 발생가능

- 시 정책사업(15분도시 조성) 관련은 공유재산 무상임대 조건에 부합되나, 시 재산관리 부서에서 아직 승인하지 않음. 추후 공원 조성공사 마무리 전 시 체육진흥과와 협의를 통한 무상임대사용 승인 必

○ 기존 시설물인 택시종사자 쉼터와 사무실(컨테이너) 시설 정비를 통한 체육공원과의 조화 필요

□ 향후 추진계획 : 해당없음

□ 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	-	-	-	-

구 분	내 용	관련사진
주민설명회	○ 일 시: 23. 11. 24. (금) 17:00 ○ 장 소: 덕포2동 행정복지센터 ○ 대 상: 사업 관련 부서장, 덕포2동 주민 등 ○ 내 용: 추진경과 보고, 설계 안 설명, 의견청취 등

□ 현장사진

3월 3O일 (공사현장)		3월 3O일 (공사현장)
준공(5.31.) 후	준공 현수막 게시