8-9		모라동 도시재생 뉴딜사업

사업기간	■ 임기내 □ 임기후	사업유형	□ 신규 ■ 계속
주 체	□ 국가 □ 부산시 □ 부산시+사상구 ■ 사상구 □ 기타	예 산	■ 예산 □ 비예산
추진상황	□ 완료 □ 이행 후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기
주관부서	(부서)도시재생과 (팀)지역공동체팀	담당자	김지아(☎4932)
			임은정(☎4935)

Ⅰ. 공약실천계획

□ 사업개요

○ 사 업 명: 마을이 들썩들썩, 시장이 시끌벅적, 주민이 무럭무럭, 모여라! 모라로 : 공존

○ 위    치: 모라동 1140-5번지, 모라전통시장일원 (면적=102,000㎡)

○ 사업기간: 2021년 ~ 2026년(6년간)

○ 사 업 비: 200억 원(국100, 시50, 구50) * 총사업비 621.21억원(부처연계사업 등 포함)

□ 사업내용

○ 주요사업: 3개 분야, 7개 사업

주민이 함께하는 생활문화공간	활력 넘치는 골목상권	주민과 상인의 공존의 장
다온플랫폼 조성	문화공작소 조성	모래내 마을공동체 역량강화
노후주거지 개선
	모라 전통시장 활력UP사업	마을관리 협동조합 육성·운영
안전한 보행로 조성

□ 연차별 추진계획

(연도별 로드맵)

세부 추진내용	임기 내									임기 후
	2022.7월		2023		2024		2025		2026.6월
주민이 함께하는 생활문화공간
활력 넘치는 골목상권
주민과 상인의 공존의 장

□ 연차별 소요예산액                                                (단위: 백만 원)

구 분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후
계	20,000	6,309	2,383	3,608	4,684	3,016
국 비	10,000	3,100	900	1,600	4,400	0
시 비	5,000	-	600	1,800	-	2,600
구 비	5,000	3,209	883	208	284	416
기 타

Ⅱ. 추진실적

□ 공약달성 확인지표

세부사업명	공약이행확인지표	비고
거점시설 3개소 조성	• 거점시설 준공: 3개소(모래내 다온플랫폼, 문화공작소, 활력UP센터)
노후주택 정비 지원	• 노후주택 정비 지원: 42호(단독주택 36호, 공동주택 6호)
안전한 보행로 조성 등	• 안전한 보행로 조성: 3개 구역 • 우리동네 골목정원 조성: 2개 구역 • 모라전통시장로 조성: 1개 구역

□ 현재까지 추진경과

○ 2021. 7.: 모라동 도시재생뉴딜사업 선정

○ 2021. 9.: 도시재생활성화계획 고시, 현장지원센터 운영, S/W사업 추진

○ 2022. 4.: 사상구-LH 거점시설 조성에 대한 위·수탁 협약체결

○ 2023. 5. ~ 2024. 6.: 거점시설(3개소, LH위탁) 설계용역

○ 2023. 10. ~ 2024. 6.: 안락한 보행환경 설계용역

○ 2024. 8. ~ 2025. 9.: 안락한 보행환경 착공 및 준공

○ 2024. 11. ~ 2026. 1.: 거점시설(2개소) 착공 및 준공  ※ 26. 4. 모래내 다온플랫폼 준공예정

□ 분기별 추진실적

○ 목표대비 추진율(누계)

공약목표	22.4분기	2023				2024				2025
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
추진율(%)	20	30	40	45	50	55	60	80	85	87	89	91	93

○ 주요 추진실적

분기	추진내용	비고
2022년 3, 4분기	• ‘22. 7.: 거점시설 조성(부산시 공공건축심의) 노후주택 정비 지원사업(집수리 선정위원회 개최) • ‘22. 8.: 노후주택 정비 지원사업(57호 설계용역) • ‘22. 9.: 거점시설 조성관련 기존 건축물 철거 및 지반조사
2023년 1분기	• ‘23. 3.: 거점시설(3개소) 설계 공모(→LH위탁) 노후주택 정비 지원 공사업체 선정 및 착공
2023년 2분기	• ‘23. 5.: 거점시설(3개소) 설계업체 계약(LH위탁) • ‘23. 6.: 안전한 보행로 조성 등 ’시민공감 디자인단‘ 운영(부산디자인진흥원 주관) 노후주택 정비 지원 사업 공사 중
2023년 3분기	• ‘23. 5.~‘24. 6.: 거점시설(3개소) 설계(LH위탁) • ‘23. 6.~‘23. 12.: 안전한 보행로 조성 등 ’시민공감 디자인단‘ 운영(부산디자인진흥원 주관) • ‘23. 7.: 노후주택 정비 지원 사업 준공
2023년 4분기	• ‘23. 5.~‘24. 6.: 거점시설(3개소) 설계(LH위탁) • ‘23. 6.~‘23. 12.: 안전한 보행로 조성 등 ’시민공감 디자인단‘ 운영(부산디자인진흥원 주관) • ‘23. 10.~‘24. 6.: 안전한 보행로 조성 등 설계용역
2024년 1분기	• ‘23. 5.~‘24. 6.: 거점시설(3개소) 설계(LH위탁) • ‘23. 10.~‘24. 6.: 안전한 보행로 조성 등 설계용역, 주민설명회 개최
2024년 2분기	• ‘23. 5.~‘24. 6.: 거점시설(3개소) 설계(LH위탁), 완료보고회 개최 • ‘23. 10.~‘24. 6.: 안전한 보행로 조성 등 설계용역, 완료보고회 개최
2024년 3분기	• ‘24. 8.~‘25. 9.: 안전한 보행로 조성 착·준공 • ‘23. 7.~‘24. 11.: 거점시설(3개소) 건설사업관리용역 발주 및 市 계약심사
2024년 4분기	• ‘24. 8.~‘25. 9.: 안전한 보행로 조성 착·준공 • ‘24. 11.~‘25. 12.: 거점시설(3개소) 조성 착·준공
2025년 1분기	• ‘24. 8.~‘25. 9.: 안전한 보행로 조성 착·준공 • ‘24. 11.~‘25. 12.: 거점시설(3개소) 조성 착·준공
2025년 2분기	• ‘24. 8.~‘25. 9.: 안전한 보행로 조성 착·준공 • ‘24. 11.~‘25. 12.: 거점시설(3개소) 조성 착·준공
2025년 3분기	• ‘24. 8.~‘25. 9.: 안전한 보행로 조성 착·준공 • ‘24. 11.~‘25. 12.: 거점시설(3개소) 조성 착·준공
2025년 3분기	• ‘24. 11.~‘26. 1.:: 거점시설(2개소) 조성 착·준공 • ‘24. 11.~‘25. 4.: 거점시설(1개소) 조성 착·준공

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

○ ‘26. 1.: 거점시설(2개소) 준공 및 운영

○ ‘26. 4.: 거점시설(1개소) 준공 및 운영

Ⅲ. 구민참여(소통) 실적

(단위: 건)

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	-	4	4	-

○ 설명회/ 전문가 자문 등

구 분	내 용	관련사진
주민감리단 운영 (3회)	○ 기 간: 2025. 10월~12월 ○ 장 소: 모래내톡톡상생플러스 센터 ○ 대 상: 주민감리단, 감리단장 등 10여 명 ○ 내 용: 거점시설 조성 주민감리단 운영
네트워크 구축 컨설팅	○ 일 자: 2025. 11. 19. ○ 장 소: 순천 비타민 저전골 마을관리사회적협동조합 ○ 참 여: 모래내 마사협 조합원 및 현장지원센터 30명 ○ 내 용: 마사협 추진사업 노하우 공유, 마을 현장 투어 및 실무자 간 교류 등
구 분	내 용	관련사진
도시재생사업 업무 연찬회	○ 일 자: 2025. 12. 5. ○ 장 소: 사상구청 도시재생과 ○ 대 상: 경성대 교수, 사상구청 9명 ○ 내 용: 2025년 사상구 도시재생사업 추진현황 및 2026년 추진계획 검토 등

○ 언론/방송 보도

2025.10.28.(문화매일)	2025.11.6.(국제신문)
2025.11.9.(국제신문)	2025.11.21.(시사일보)