11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리구에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사 업 명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요 사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
덕포백양공원 지하공영주차장 건설	2,500	0	2,050 (집행 43)	450	2014	2012	5
교통안전 시범도시 사업	7,000	0	2,600 (집행 0)	4,400	2015	2012	5
육아종합 지원센터 건립	3,500	0	3,300 (집행 48)	200	2014	2012	5
사상역 뒤 철로변일원도로개설	3,150	637	300 (집행 234)	2,213	2015	2010	43
온골 지하차도 확장공사	4,500	27	500 (집행 68)	3,973	2015	2012	5

‣ (대상사업) 2012년까지 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과
(적정, 조건부)하여 2013. 6말 현재 추진 중에 있는 사업

‣ 2012년 부산시 투․융자 대상사업

- 40억이상 300억 미만 신규투자사업

- 5억이상 30억 미만 행사성사업

‣ 2013년 부산시 투․융자 대상사업(금액 변경)

- 40억이상 100억 미만 신규투자사업

- 5억이상 30억 미만 행사성사업

※ 금액의 상한이상  : 중앙심사,   하한미만 : 자체심사

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명	덕포백양공원 지하공영주차장 건설	담당자	교통행정과 김병국(☎310-4552)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 덕포2동 덕포백양공원 주변은 단독주택 밀집지역이며, 주차 수요 대비 주차장 절대 부족으로 상습 불법주․정차 민원 발생 ○ 주차 부족지역의 주차난 해소 및 이면도로의 제기능 확보로 화재 등 대형사고 발생 예방 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013. 9월 ～ 2014. 6월 ○ 위 치 : 사상구 덕포동 776-1번지 덕포백양공원 ○ 사업규모 : 지하2층 / 70면 (1층 35면, 2층 35면) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,500백만원 (시비 1,250, 구비 1,250) ○ 지금까지 집행액 : 43백만원 (시비) ○ 향후 소요액 : 2,457백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ 공유재산 관리계획 반영 (구의회 승인) : 2012.12.14 ○ 주민설명회 개최 : 2013. 1.29, 덕포2동주민센터 ○ 기본(실시)설계 및 도시관리계획 변경 용역발주 : 2013. 5월 □ 향후계획 ○ 2013. 8월 : 공사착공 ○ 2014. 6월 : 공사준공

사업명	교통안전시범도시 사업	담당자	교통행정과 김병국(☎310-4552)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 타 지역에 대비하여 장애인․노인 등 교통 약자가 많이 거주하고 있으나 지하철 등 대중교통과 연계한 보행환경 기반시설 취약 ○ “무사고무장애지역(No Accident & Barrier Free Zone)”을 구축하여 안전하고 편리하고 교통 환경 조성 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013 ～ 2015년 ○ 위 치 : 모라동 일원 ○ 사업규모 : 모라동 모라로 일원 전동차전용도로 및 보도 설치, 육교E/V, 휀스 등 설치 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 7,000백만원 (국비 3,500, 시비 2100, 구비 1,400) ○ 지금까지 집행액 : - 백만원 ○ 향후 소요액 : 7,000백만원 (2013년 2,600, 2014년이후 4,400) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ 2013. 6월 : 구비(520백만원) 및 시비(800백만원) 확보 ○ 2013. 7월 : 국비 13억원 배정 예정 □ 향후계획 ○ 2013. 8월 : 실시설계 ○ 2013. 12월 : 공사착공

사업명	육아종합지원센터 건립	담당자	복지서비스과 한태분(☎310-7423)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 어린이집의 보육을 지원하고 가족․공동체 양육기능을 보완하고자 우리지역에 영유아 전문이용시설인「육아종합지원센터」를 설치하여 양질의 보육서비스 제공코자 함 □ 사업개요 ○ 기간 : 2012. 9 ～ 2014. 4 ○ 위치 : 괘법동 516-69번지 ○ 설계사 : ㈜건축사무소 지선재 ○ 사업규모 : 연면적 1,500㎡이상(지상5층) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,500백만원 (국비 1,000, 시비 500, 구비 2,000) ○ 지금까지 집행액 : 48백만원 (2013년, 국비 4, 시비 2, 구비 42) ○ 향후 소요액 : 3,452백만원 (2013년도, 국비 996, 시비 498, 구비 1,958) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ 2012. 9 : 주민 사업설명회 개최 ○ 2013. 5 : 설계 공모작 선정 및 설계 계약(착수) ○ 2013. 6 ～ 8 : 기본 및 실시 설계 ○ 2013. 6 : 특별교부세 2억원 확보(공단지역육아종합지원센터 설치) □ 향후계획 ○ 2013. 9 ～ 10 : 공사계약 및 착공 ○ 2013.12 : 사업예산 본예산 확보(구비 2억원) ○ 2014. 4 : 공사 준공 및 개관 □ 사업변경 내역 ○ 총사업비 당초 : 2,200백만원(국비 1,000, 시비 500, 구비 700) 현재 : 3,300백만원(국비 1,000, 시비 500, 구비 1,800)

사업명	사상역 뒤 철로변일원도로개설	담당자	건설과 오남훈(☎310-4694)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 사상역뒤 철로변 인근 낙후지역의 연결도로를 개설하여 화재 등 재난상황 발생시 주민 재산권 보호 및 지역의 균형발전 도모 □ 사업개요(1단계) ○ 기간 : 2012. 5. 22. ～ 2013. 7. 28. ○ 위치 : 괘법동 사상역뒤 철로변 일원 ○ 시공사 : 고도건설산업(주) ○ 사업규모 : 도로개설 L=370m, B=8m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,150백만원(시도비 3,100, 기타 50) ○ 지금까지 집행액 : 54백만원(2011년 시비), 583백만원(2012년 시,구비) 234백만원(2013년 구비) ○ 향후 소요액 : 2,279백만원(시비) □ 1단계 추진상황(전체 추진단계 및 진도 : 43%) ○ 2011.03.09～ ‘11.11.22 : 실시설계용역 수행 ○ 2012.05.22 : 공사착공 ○ 2012.07.30 : 공사 일시정지(협의보상 불응) ○ 2012.09.10～ ‘12.12.27 : 수용재결 절차 진행 및 재결결과 통보 ○ 2013.02.07 : 공탁(토지 2필지, 지장물 2건) ○ 2013.04.09 : 공사 일시정지 해제 ○ 2013.05월 : 지장물 철거 및 토공작업 등 □ 향후계획 ○ 2013. 07월 : 1단계 공사완료 ○ 예산확보 후 사업계획의거 추진

사업명	온골 지하차도 확장공사	담당자	건설과 조봉창(☎310-4705)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 온골마을은 외부와 교통이 단절되어 도심속 오지마을로 열악한 주거환경에 놓여 있어 기존 굴다리 확장하여 주거환경개선 및 주민통행불편 해소 □ 사업개요 ○ 기간 : 2013년～2015년 ○ 위치 : 주례동 1256-1번지 일원 ○ 사업규모 : 철도횡단 지하차도 B=12m, L=42m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,500백만원(시비 3,500, 구비 1,000) ○ 지금까지 집행액 : 27백만원(2011년 시비), 68백만원(2013년 시비) ○ 향후 소요액 : 4,405백만원 □ 추진상황(실시설계용역중 5%) ○ 2011. 11 : 타당성 조사 및 기본계획 용역착수(시비 30백만원) ○ 2011. 11 : 타당성 조사 및 기본계획 용역완료 ○ 2012. 12 : 사업비 확보(시비 500백만원) ○ 2013. 6 : 온골지하차도 확장공사 도시관리계획결정 및 실시설계 용역착수 □ 향후계획 ○ 2014. 2 : 용역준공 ○ 잔여예산확보 후 공사 발주

11-2. 지방채 발행사업 : 해당사항 없음

우리구에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 없습니다.

11-3. 민간투자사업 : 해당사항 없음

우리구에서 현재 추진 중인 민간투자사업 현황은 없습니다.